문서번호	정수시설과-4752
결재일자	2018.6.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
박건수		이해승	06/05 이흥수
협 조

천만 시민과 함께하는 맛있는 아리수!

2018년 제초작업 및 조경관리용역

1차 기성검사 결과보고

2018. 6.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

2018년 제초작업 및 조경관리용역

1차기성검사결과보고

우리 정수센터 수목 및 녹지시설에 대한 2018년 제초작업 및 조경관리 용역 1차 작업을 완료하였으며, 작업지시 사항에 대한 점검결과 적정하게 완료되어 1차 기성 준공처리하고 기성금을 지급하고자 함.

1		용역 개요

용 역 명 : 2018년 광암아리수정수센터 제초작업 및 조경관리용역

용역기간 : 2018. 4. 9. ~ 2018. 12. 20.

용역내용 : 풀깍기및풀뽑기 488,477㎡, 교목전정 360주, 관목전정

10,971㎡, 기타 환경정비 등

용역금액 : 142,666,990원

용역업체 : 청진조경건설(주) 대표 김범호

2		작업내용 및 점검결과

작업내용

작 업 공 종		1차	소 계	비 고
잔디깍기(승용식)		22,165㎡	22,165㎡
잔디깍기(배부식)		9,499㎡	9,499㎡
풀깍기(일반지역)		49,386㎡	49,386㎡
풀깍기(돌섞인지역)		10,719㎡	10,719㎡
풀뽑기(초화류,관목사이)		3,954㎡	3,954㎡
풀뽑기(일반잔디)		1,971㎡	1,971㎡	야생화, 잡초풀등
관목전정		-	-
교목전정	B11~20cm	-	-
	B21cm이상	-	-
시비		-	-
임목폐기물 처리		-	-
칡덩쿨 및 고사목제거		-	-

작업 확인점검 결과

· 점검대상 : 작업1차 물량

· 점검일시 : 2018. 6. 4.

· 점검방법 : 공종별 전수검사

· 점검내용

작 업 공 종		작업내용	소 계	점 검 결 과	비 고
잔디깍기(승용식)		정수센터내 잔디깎기, 잡초 제거 및 정리	22,165㎡	적 정
잔디깍기(배부식)			9,499㎡	적 정
풀깍기(일반지역)			49,386㎡	적 정
풀깍기(돌섞인지역)			10,719㎡	적 정
풀뽑기(초화류,관목사이)			3,954㎡	적 정
풀뽑기(일반잔디)			1,971㎡	적 정
관목전정		관목 전지 및 정리	-	-
교목전정	B11~20cm	교목 전지 및 정리	-	-
	B21cm이상		-	-
시비		수목시비	-	-
임목폐기물 처리		적치 임목 폐기물	-	-
칡덩쿨 및 고사목제거		칡덩쿨 및 고사목제거	-	-

· 입회확인자 : 토목7급 이향연, 토목8급 박건수

· 점검결과 : 제초작업 및 조경관리용역 적정여부 확인결과 작업지시내용과 같이 적정 완료되었으며, 전반적으로 작업상태 양호함.

작업상태 점검사진

정수지 위 제초작업 후	북측 정수사면 제초작업 후

3		처리의견

정수센터 제초작업 및 조경관리용역 1차 작업지시 사항에 대한 현장점검결과 이상없이 정비되었음.

제초작업 및 조경작업 상태가 적정하다고 판단되어 1차 기성처리     하고자 함.

붙임  1. 1차 작업지시서 1부.

2. 1차 작업완료보고서 1부.

3. 1차작업 주요공종 사진 1부.  끝.