＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	상수도사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행(우면산가압장 급수체계 개선공사 임목폐기물 처리용역)

1. 우리본부와 계약 체결하여 시행중인 『우면산가압장 급수체계 개선공사 임목폐기물 처리용역』에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행하고자 합니다.

가. 용 역 명 : 우면산가압장 급수체계 개선공사 임목폐기물 처리용역

나. 계약업체 : ㈜엘에스에너지 대표 성 준

다. 계약기간 : 2018. 04. 09.~2018. 06. 08.

라. 변경사유 : 계약물량 증감에 따른 변경

마. 변경내역                                               (단위:원)

구 분	당 초	변 경	증ㆍ감	비고
도 급 비	5,248,000	6,819,000	증1,571,000

바. 예산과목 : 자본적지출,비가동설비자산취득,건설중인자산,시설비및부대비,시설비

붙임 : 1. 설계변경심의 소위원회 개최결과 보고 및 관련서류 1부

2. 설계변경 내역서 및 설계변경 사유서 각 1부.

3. 합의서 1부.

주무관	김기봉		시설과장	송병욱		시설안전부장	06/05 代유승효
협조자	주무관	배현진		주무관	안희숙
시행	시설과-5318	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동27-1)	/
전화	02-3146-1495	/전송	02-3146-1529	/	bong0701@seoul.go.kr	/	대시민공개