투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(공기연장으로 인한 추가간접비 계약금액 반영 요청에 따른 검토 자료 제출)

1.업무지시현장 : 서울지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사(T/K) 벽산엔지니어링 주식

회사

2.작 성 일 자 : 2018-06-04 18:06:57

3.지 시 내 용

가. 롯건서지현 제2018-271(‘18.5.30)호와 관련입니다.

나. 서울지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사와 관련 시공사로부터 공기연장으로 인한 추가간접비 등 계약금액 반영 요청이 있어 관련 자료를 송부하오니 감리단에서는 면밀히 검토하여 결과를‘18.6.8(금)까지 제출하여 주시기 바랍니다.  끝.

※ 본 기안은 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시

One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송처리 됩니다.

※ 업무지시전 내용 수정을 원하는 경우 One-PMIS로 반송 후 One-PMIS에서 재작성을 해

주시기 바랍니다.

주무관							엄상민			주무관					김용선					토목1과장					06/05 윤방식
협조자
시행			도시철도토목부-6759									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로8 프리미어플레이스9층															/
전화		772-7214						/전송			772-7306					/													/	대시민공개