문서번호	급수운영과-8617
결재일자	2018.6.7.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
고원석		06/07 代김생수
협 조
	주무관			박홍

“명품 아리수, 명품 강남수도”

설계변경(3차-최종) 심사요청에 따른 보고 (2017년 청담동외 6개동 상수도공사)

2018년 6월

강남수도사업소

(급수운영과)

설계변경(3차-최종) 심사요청에 따른 보고

우리사업소가 시행하는 “2017년 청담동외 6개동 상수도공사”의 계약물량 증․감 등 변경사항이 발생되어 본부 재무회계과에 설계변경 심사요청하고자 함.

□  공사개요

□ 공 사 명 : 2017년 청담동외 6개동 상수도공사(장기계속단가계약)

□ 공사개요 : D=13~400mm, L=1,424m

□ 계약기간 : 2017.07.05. ~ 2018.06.30

□ 도 급 비 : *************

□ 도 급 자 : ***************

□  설계변경 현황

□ 설계변경 사유 : 시공물량 증․감 및 신규공정 발생에 따른 계약물량 조정

□ 주요 시공물량 증․감 내역

공 종		단 위	당 초	변 경	비 고
토 공	되메우기(인력)	㎥	****	****	*****
	잔토상차(집하장)	㎥	***	***	****
	인력터파기(용수,협소), 견질토사 0-1m	㎥	***	****	*****
	아스팔트 포장절단	m	****	****	*****
부설공	주름마디 스텐관 부설공(D20)	m	***	***	***
	주름마디 스텐관 부설공(D25)	m	***	***	****
	주름마디 스텐관 부설공(D30)	m	***	***	****
	주름마디 스텐관 부설공(D40)	m	**	***	****
	주름마디 스텐관 부설공(D50)	m	**	***	****
	벽체계량기설치공(15mm)	개소	***	***	*****

공 종		단 위	당 초	변 경	비 고
부설공	상수도관 부설공(D80)	m	**	**	***
	상수도관 부설공(D100)	m	**	**	****
	상수도관 부설공(D150)	m	**	*	****
	상수도관 부설공(D80), 야간	m	*	**	****
구조물공	원형밸브실 설치공(D80)	개소	*	*	***
부대공	작업차량(급수공사)	개소	***	***	****
	안전원	인	***	***	****

□ 신규공정 발생내역

- 부설공 : 부단수할정자관천공분기점분기(80mm, 야간) 추가

- 사급자재 : 부단수활정자관(200/100)외 1종

□ 설계변경 내역

구 분	당초 금액	변경 금액	증․감
도 급 비	************	************	*************
공급가액	************	************	*************
부가가치세	***********	***********	*************

□  향후 계획

- 계약 물량 증․감 및 신규 공정 발생에 따른 ****************으로 본부 재무회계과에 설계변경 심사요청하고자함.

붙임 : 설계변경 내역서(3차-최종) 1부.  끝.