문서번호	인재기획과-6517
결재일자	2018.6.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	인재기획과장
강상천		이창희	06/07 代오세우
협 조

인재원 다솜관 2층 옥상

방수 보수 공사 설계변경

2018. 6.

인재개발원

인재기획과

인재원 다솜관 2층 옥상 방수 보수 공사 설계변경

다솜관 2층 옥상 방수 보수 공사 추진 중 건축물 노후로 인한 설계변경 사유가 발생 신속한 공사 추진을 위하여 설계변경 처리 하고자 함

Ⅰ		공사개요

○ 공 사 명 : 다솜관 2층 옥상(부분) 방수 보수 공사

○ 계약금액 : 44,123,200원

○ 시 공 사 : ㈜우원건업  대표 임혜숙

○ 계약일자 : 2018.5.23

○ 착공일자 : 2018.5.24

○ 준공일자 : 2018.6.13

Ⅱ		설계변경

○ 설계변경 내용

- 위  치 : 2층 옥상 바탕(무근 콘크리트)

- 내  용 : 옥상 바닥 노후도가 심하고 물 구배 불량으로 배수에 지장을 초래할

수 있어 물 구배를 추가 보완하여 방수 보수 공사 추진

○ 계약금액

- 변경전 : 44,123천원

- 변경후 : 45,650천원 (증 1,527천원)

○ 공사기간 : 변동 없음

Ⅲ		검토의견

○ 옥상 바닥 무근콘크리트의 노후도가 심하고 물 구배가 불량하여 노후화된   무근콘크리트를 제거한 후 물 구배와 함께 추가 보완한 후 방수 보수 공사를 추진하는 것이 타당하다고 판단됨