위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	계약기간 변경 요청(중림동 창고 신축공사 설계용역)

우리부서에서 추진중인 ‘중림동 창고 신축공사 설계용역’ 계약기간을 아래와 같이 연장요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 중림동 창고 신축공사 설계용역

나. 용 역 자 : 건축사사무소 에브리아키텍츠(대표 강정은)

다. 용역기간 변경내용

구 분	변경전		변경후		비고
	계약기간	계약금액	계약기간	계약금액
중림동창고 설계용역	`18.2.9.~`18.6.8	52,250,000	`18.2.9.~`18.6.22	52,250,000	· 용역기간14일 연장 · 금액변경없음

라. 변경사유 : 공용건축물 협의 중 관계부서 보완요청에 따른 소요기간 연장 필요

마. 귀책사유 : 서울특별시(지체상금 미부과)

붙 임 1. 계약기간 변경검토 보고서 1부.  끝.

	공공재생과장
주무관	유우린		서울역재생계획팀장	정병익		공공재생과장	06/07 홍선기
협조자
시행	공공재생과-5486	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 (태평로1가)	/
전화	02-2133-8644	/전송	02-2133-0885	/	archi-rin@seoul.go.kr	/	대시민공개