문서번호	정수과-6040
결재일자	2018.6.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	영등포아리수정수센터소장
유민석		정종기	06/07 이성락
협조

장외영향평가서 및 위해관리계획서 작성용역 결과보고

2018. 6.

영등포아리수정수센터

【 정수과 】

장외영향평가서 및 위해관리계획서 작성용역 결과보고

화학물질관리법 준수를 위한 “장외영향평가서 및 위해관리계획서 작성용역”을 실시하고 그간 추진경과 및 결과를 보고 드림

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 장외영향평가서 및 위해관리계획서 작성용역

○ 계약업체 : (재)한국화학융합시험연구원(전자공개수의계약)

○ 계약금액 : 43,223,220원(선금 지급: 12,960,000원)

○ 계약기간 : ’17. 3. 20. ~ ’18. 6. 30.

○ 과업개요 : 유해화학물질 및 시설을 취급하는 취수장·정수장의 장외영향평가서 및 위해관리계획서를 작성·제출하여 환경부 승인 및 화학물질관리법 준수

□ 추진경과

일 시

내 용

일 시

내 용

’17. 2.24.

용역 시행계획 방침 수립

’17.11.30.

위해관리계획서 수정·보완 요청

[정수장](2차)(←화학물질안전원)

’17. 3.15.

용역 계약체결

’17.12. 5.

위해관리계획서 수정·보완 제출

[정수장](2차)(→화학물질안전원)

’17. 3.20.

용역 착수보고회 개최

’17.12.11.

위해관리계획서 검토결과(적합) 통보

[정수장](←화학물질안전원)

’17. 6. 5.

장외영향평가서 제출

[정수장·취수장](→화학물질안전원)

’17.12.13.

유해화학물질 사용업 허가신청

[정수장](→한강유역환경청)

’17. 7. 3.

위해관리계획서 제출

[정수장·취수장](→화학물질안전원)

’17.12.22.

위해관리계획서 검토결과(적합) 통보

[취수장](←화학물질안전원)

’17. 7.20.

장외영향평가서 진행사항 안내

[정수장·취수장](←화학물질안전원)

’17.12.28.

유해화학물질 사용업 허가신청

[취수장](→한강유역환경청)

’17. 9.12.

위해관리계획서 수정·보완 요청

[정수장·취수장](1차)(←화학물질안전원)

’18. 1.16.

유해화학물질 조건부 영업허가 통보

[정수장](←한강유역환경청)

- 적합 통보받은 장외영향평가서의 기한내 제출 조건(~’18.4.15.)

’17.10.13.

위해관리계획서 수정·보완 제출

[정수장·취수장](1차)(→화학물질안전원)

’18. 3.20.

장외영향평가서 수정·보완 요청

[정수장·취수장](←화학물질안전원)

’17.11. 9.

용역기한 연기 및 예산사고이월 방침수립

’18. 3.21.

유해화학물질 조건부 영업허가 통보

[취수장](←한강유역환경청)

- 적합 통보받은 장외영향평가서의 기한내 제출 조건(~’18.6.20.)

’17.11.17.

용역 변경계약체결(계약기간 연장)

당초	변경	비고
’17.3.20.~ ’17.11.19.	’17.3.20.~ ’18.6.30.	검토기관의 검토지연

’18. 3.29.

장외영향평가서 수정·보완 제출

[정수장·취수장](→화학물질안전원)

’18. 4. 4.

장외영향평가서 검토결과(적합) 통보

[정수장·취수장](←화학물질안전원)

’18. 5.11.

용역 최종보고회 개최

□ 과업내용

□ 장외영향평가서 작성

○ 기본평가정보

- 사업장 일반정보, 취급시설 개요

- 유해화학물질 목록, 취급량 및 유해성 정보

- 공정개요, 공정흐름도, 공정배관계장도, 운전절차 및 유의사항

- 취급시설 입지정보(공장위치도, 전체배치도, 설비배치도)

- 주변지역 입지정보 및 기상정보

○ 장외평가정보

- 공정위험성 분석

- 사고시나리오 선정(최악,대안의 사고시나리오 선정)

- 사고시나리오별 사업장 주변지역 영향 평가

- 안전성 확보 방안(위험도 분석, 관리적 대책)

○ 타법과의 관계정보

- 고압가스안전관리법, 환경오염피해배상책임및구제에관한법률, 물환경보전법 등

□ 위해관리계획서 작성

○ 사업장 일반정보 및 취급시설 개요, 사고대비물질 목록 및 유해성 정보

○ 취급시설 목록, 방제시설 및 장비의 보유 현황

○ 사고대비물질 취급시설의 공정안전정보 및 운전책임자 등 현황

○ 화학사고 대비 교육·훈련 및 자체점검 계획

○ 화학사고 발생시 비상연락체계 및 안전관리담당 조직

○ 화학사고 발생시 유출·누출 시나리오 및 응급조치 계획

○ 화학사고 발생시 영향범위 주민 확인 및 주민 소산계획

○ 화학사고 피해의 최소화·제거 및 복구 등을 위한 조치계획 등

□ 작성 및 제출 등 대관업무

○ 심사에 필요한 도면 등 필요한 자료에 대해 현장조사를 통한 추가 작성

○ 장외영향평가서 및 위해관리계획서 관련한 제출·심사·현장 확인과정 참여

****************************************

*******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

□ 용역 실시결과

○ 장외영향평가서,위해관리계획서의 작성·제출에 따른 검토기관(화학물질안전원) 적합승인 및 「화학물질관리법」관련 의무사항 준수

○ 화학사고대비 대응체계 확립 및 화학사고 피해 최소화를 위한 조치계획 수립

○ 최종성과품 납품

최종성과품		수량	비 고
취수장	장외영향평가서(도면포함)	3부	검토기관·허가기관에 2부 제출완료
	위해관리계획서(도면포함)	3부	검토기관·허가기관에 2부 제출완료
	성과품 수록 CD	2식	최초,보완,최종본 파일 수록
정수장	장외영향평가서(도면포함)	3부	검토기관·허가기관에 2부 제출완료
	위해관리계획서(도면포함)	3부	검토기관·허가기관에 2부 제출완료
	성과품 수록 CD	2식	최초,보완,최종본 파일 수록
장외영향평가서 및 위해관리계획서[취수장·정수장]		성과품 수록 CD(최초,보완,최종본 포함)

※ 최초 및 보완 과정에서의 작성·제출본은 검토기관으로부터 회수시 보안상 문제로 폐기

□ 향후계획

○ 선금 정산내역 검토 및 준공검사조서 작성하여 용역 준공처리

붙임  1. 장외영향평가서 및 위해관리계획서 적합통보 공문[취수장·정수장] 각 1부.

2. 장외영향평가서 및 위해관리계획서 성과품[취수장·정수장] 각 1부(따로붙임).

3. 유해화학물질 사용업 허가승인 공문[취수장·정수장] 각 1부.

4. 용역 최종보고회 개최 결과보고 1부.  끝.