문서번호	토목부-9732
결재일자	2018.6.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
남덕희		명경출	06/07 김영수
협조

건설폐기물처리용역 설계변경 검토(1차2회)

(노들섬 특화공간 조성 토목공사)

2018. 6.

도시기반시설본부

(토 목 부)

건설폐기물처리용역 설계변경 검토(1차2회)

(노들섬 특화공간 조성 토목공사)

노들섬 동측 건물철거지연 및 하단부 콘크리트 포장 철거 물량 변경에 따른 수량 감소로 본 공사 건설폐기물처리용역 설계변경하고자  검토 보고 드림

※ 유탑노들 18-106호(`18.6.5.) : 노들섬 특화공간 조성 토목공사 건설폐기물 용역변경요청의 건

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 노들섬 특화공간 조성 토목공사 건설폐기물 처리용역

○ 용역규모 : 운반 (5,583㎥), 처리(12,860톤)

○ 용역기간 : 전체 `17.11.13~`18.12.20(1차 `17.11.13~`18.6.10.)

○ 도 급 액 : 전체 348,447천원(1차 218,790천원)

○ 용 역 사 : ㈜문안이엔티 외 1

□ 검토내용

○ 설계변경사유

- 노들섬 동측 건물 철거 지연에 따른 철거 물량 감소

- 노들섬 하단부 콘크리트 포장계획 변경으로 물량 감소

- 스마트송장 시스템비용 반영(운반비의 1.5%)

○ 설계변경 현황

구 분		당 초	변 경	증·감
계약금액	전체	348,447천원	348,447천원	변경없음
	1차(2회)	218,790천원	199,031천원	감19,759천원

※ 기간 변경없음

○ 변경내용

- 주요 수량 변경

구 분		단위	당 초	변 경	증·감
폐기물운반		㎥	3,493	3,183	감 310
스마트송장		㎥	-	506	증 506
페기물처리	폐콘크리트	톤	7,047	6,820	감 227
	폐아스콘	톤	1,006	510	감 496

- 공사비 변경

· 1차(2회)                                                  (단위: 천원)

공 종 명	단위	수 량			금 액
		당 초	변 경	증·감	당 초	변 경
Ⅰ.폐기물 처리비
폐콘크리트	ton	7,047	6,820	감 227	105,156	101,769
폐아스콘	ton	1,006	510	감 496	16,511	8,370
소 계					121,667	110,139
Ⅱ.폐기물 운반비
폐콘크리트	㎥	3,064	2,966	감 98	55,903	54,115
폐아스콘	㎥	429	217	감 212	7,927	4,010
소 계					63,830	58,125
일반관리비					6,383	5,812
이 윤					7,020	6,723
스마트송장	㎥	-	506	증 506	-	138
소 계					198,900	180,937
부가가치세					19,890	18,094
용 역 비					218,790	199,031

□ 조치 계획

○ 본 공사 건설폐기물처리용역(1차) 설계변경에 대한 감리단 검토내용이 적정하므로 설계 변경 시행하고자함

따로붙임 : 1. 감리단 검토의견서 1부.

2. 설계변경내역서 1부.  끝.