투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시체육시설관리사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	2018 목동운동장 시설물유지보수공사(연간단가) 설계변경(1차) 시행

목동사업과에서 시행중인『2018 목동운동장 시설물유지보수공사(연간단가)』 계약건에 대해 다음과 같이 설계변경(1차)을 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2018 목동운동장 시설물유지보수공사(연간단가)

나. 도 급 자 : (주)후레씨네코리아 대표이사 김지영

다. 계약금액 : 금557,304,100원(금오억오천칠백삼십만사천백원정)

라. 공사기간 : 2018.01.31.~12.15.

마. 공사내용 : 콘크리트 균열보수, 방수 등 193개 공종

바. 예산과목 : 시민체육시설운영및관리, 노후체육시설개보수사업, 목동운동장ㆍ신월야구공원시설개ㆍ보수, 시설비및부대비, 시설비

사. 설계변경(1차) 내용

구 분	당초금액	변경금액	증감	변경사유
총공사비	557,304,100원	557,304,100원	±0	공사세부공종증가 167공종→193공종
도 급 비	557,304,100원	557,304,100원	±0

붙 임  1. 설계변경 사유서, 설계변경 내역서 및 합의서 각 1부.

2. 작업지시 공문 각 1부.  끝.

주무관	이승언		목동사업과장	06/08 이정권
협조자	주무관	이동열
시행	목동사업과-4510	(		)	접수		(		)
우	07990	서울특별시 양천구 안양천로 939 (목동) 목동사업과	/
전화	02-2640-3831	/전송	02-2649-7145	/	sormang@seoul.go.kr	/	부분공개(5)