	서울특별시인재개발원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	다솜관 2층 옥상(부분) 방수 보수 공사 설계변경 시행

1. 인재기획과-6517(2018.6.7.)호 관련입니다.

2. 다솜관 2층 옥상 방수 보수 공사의 도급비 설계변경을 아래와 같이 시행하고자 합니다.

가. 공사명 : 다솜관 2충 옥상(부분) 방수 보수 공사

나. 공사규모

- 변경전 : 2층 옥상 방수 보수 184㎡

- 변경후 : 옥상 바닥 무근콘크리트 및 물 구배 추가 보완 92㎡

다. 공사금액

- 변경전 : 금44,123,200원

- 변경후 : 금45,650,000원 (증 1,526,800원)

라 공사기간 : 2018.5.24 ~ 2018.6.13 (변경없음)

마 시 공 자 : ㈜우원건업   대표 임혜숙

바 설계변경 사유 : 노후 옥상바닥(무근콘크리트 및 물 구배) 보완 공사 추가

사 예산과목 : 인재원청사 보수·보강, 시설비(401-01)

붙임 1. 설계변경 설계서 및 내역서 1부.

2. 설계변경 보고서 1부.  끝.

주무관	강상천		시설관리팀장	이창희		인재기획과장	06/08 代오세우
협조자	교육지원팀장	윤우창
시행	인재기획과-6584	(		)	접수		(		)
우	06756	서울특별시 서초구 남부순환로340길 57 서울특별시 인재개발원 (서초동)	/	http://hrd.seoul.go.kr
전화	02-3488-2051	/전송	02-3488-2346	/	kangmul@seoul.go.kr	/	대시민공개