위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	계약기간 변경 요청(중림동 창고 신축공사 설계용역)

1. 공공재생과-5486(2018.06.07.)호 관련입니다.

2. 우리부서에서 추진중인 ‘중림동 창고 신축공사 설계용역’계약기간 연장요청을 위한 붙임문서를 재제출하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 중림동 창고 신축공사 설계용역

나. 용 역 자 : 건축사사무소 에브리아키텍츠(대표 강정은)

다. 용역기간 변경내용

구 분	변경전		변경후		비고
	계약기간	계약금액	계약기간	계약금액
중림동창고 설계용역	`18.2.9.~`18.6.8	52,250,000	`18.2.9.~`18.6.22	52,250,000	· 용역기간14일 연장 · 금액변경없음

라. 변경사유 : 공용건축물 협의 중 관계부서 보완요청에 따른 소요기간 연장 필요

마. 귀책사유 : 서울특별시(지체상금 미부과)

붙 임 1. 계약기간 변경검토 보고서 1부.

2. 준공기한 연장사유서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	공공재생과장
주무관	유우린		서울역재생계획팀장	정병익		공공재생과장	06/08 홍선기
협조자	계약1팀장	조현
시행	공공재생과-5542	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 (태평로1가)	/
전화	02-2133-8644	/전송	02-2133-0885	/	archi-rin@seoul.go.kr	/	대시민공개