＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	뚝도아리수정수센터
수신	행정관리과장
(경유)
제목	변경계약 의뢰(준공기한 연기)

우리과에서 시행중인 ‘뚝도아리수정수센터 취정수장 장외영향평가서 및 위해관리계획서 작성용역’에

대하여 다음과 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 용역명 : 뚝도아리수정수센터 취정수장 장외영향평가서 및 위해관리계획서 작성용역

2. 계약자 : **********************

- *******************************************

3. 준공기한 연기내역

구 분	변 경 전	변 경 후	변경내역
계약기간	2017.3.17.~2018.06.30.	2017.3.17.~2018.12.07.	기간연장
계약금액	금67,867,000원	금67,867,000원	변경없음

4. 귀책사유 : 계약상대자 귀책사유 없음

5. 연기사유 : 화학물질안전원 심사기간 소요에 따른 용역기간 연장

따로 붙임 : 1. 방침서 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부. 끝.

	정수과장
주무관	윤좌헌		정수과장	06/08 김효상
협조자	주무관	양은영		주무관	석은숙
시행	정수과-3383	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 왕십리로 27	/
전화	02-3146-5549	/전송	02-3146-5509	/	jwaheon1@seoul.go.kr	/	부분공개(7)