투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신자	관리단속과장
(경유)
제 목	관급자재 수량변경 요청(사천교 성능개선공사 도막형바닥재)

1. 사천교 확장 및 성능개선공사 관급자재 구매와 관련입니다.

2. 우리 사업소에서 시행중인 ‘사천교 성능개선공사’에 사용된 관급자재(도장형바닥재)에 대하여 아래와 같이 수량변경 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

가. 관급자재 수량변경 요청 내역

납품요구번호	물품식별번호	품 명	계약자	계약수량	변경수량	증·감	납품기한
		규 격
12-18-1-44757-00	23303588	도장형바닥재	㈜이엘포장	832㎡	860㎡	증)28㎡	2018.06.30
		ELAS101, t1mm, 열경화성수지/MMA

나. 변경사유 : 현장 시공중 민원 등에 따른 시공물량 일부 추가 반영.  끝.

	시설보수과장
주무관	이동섭		주무관	권순회		시설보수과장	06/11 신동헌
협조자
시행	시설보수과-4614	(		)	접수		(		)
우	03918	마포구 가양대로 203 서부도로사업소 시설보수과	/
전화	02-300-8374	/전송	02-300-8384	/	lds0420@seoul.go.kr	/	대시민공개