문서번호	시설관리과-10159
결재일자	2018.6.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장
최지영		06/11 代윤복철
협조

현장 실정에 따른 검토 보고 (서초동1338-11 외 2 배수관정비공사)

2018. 6.

강남수도사업소

(시설관리과)

현장실정에 따른 검토보고

『서초동 1338-11 외 2개소 배급수관정비공사』와 관련, 감독 시행하는 서울특별시 시설공단으로부터 현장실정보고서가 접수되어 검토 후 아래와 같이 보고합니다.

〔공사감독2처-5966(2018.6.4.),-6344(2018.6.8.)〕

1		공사현황

가. 공 사 명: 서초동 1338-11 외 2개소 배급수관 정비공사

나. 공사기간: 2018. 04.16. ~ 2018.12.23.

다. 공 사 비: 도급비 금860,060,450원

라. 공사개요: 배수관부설 D=15~300mm, L=1,845m, 밸브실 57개소

마. 도 급 자: 진흥공영(주) 대표 이기성

바. 감 독 청: 서울시시설공단(대리 이가람)

2		보고내용

상기 공사의 현장실정보고서를 검토하고 보고합니다.

가. 실정보고 내용

1) 1구간 관급자재 추가 요청

- 1구간 배관설계도면과 하수도 하월 등 실제 시공현황(현장여건 등)이 상이하여 관급자재 추가 요청함

2) 3구간 부단수 분기

- 3구간 정자분기를 부단수 천공 분기 시공

3		사업소 검토의견

가. 검토의견

1) 1구간 관급자재 추가 요청

- 대상: 1F단관 80㎜*L650 6개, KP접합부속 80㎜ 6개

- 금액: 증)300천원

2) 3구간 부단수 분기

- 3구간 정자분기를 부단수 천공 분기 시공

- 정자분기시 단수예상: 약500세대이상

- 금액: 증)5,000천원

4		조치의견

가. 위 검토의견을 시설공단에 회신하여 향후 설계변경시 반영토록 하고자 함.  끝.