문서번호	기전과-2596
결재일자	2018.6.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전과장	남부도로사업소장
김현태		임태수	06/11 박기범
협조
	주무관		김해중

난곡터널 터널등, CCTV 이설 추진 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 6.

남부도로사업소

(기 전 과)

난곡터널 터널등, CCTV  이설 추진 계획

난곡터널 방음벽 설치에 따른 기전시설물(터널등, 케이블 트레이, CCTV) 이설 추진계획을 수립, 시설물 유지 관리에 만전을 기하고자 함

1		추진 개요

□ 추진근거

○ 난곡터널 보수공사관련 터널등 이설요청(시설보수과-2185, 2018.5.30.)

□ 시설현황

구분	연장	조 명	CCTV	비상벨	소화기	비고
상행	360M	NH 250W×263등	3	6	24	금회 대상
하행	360M	NH 250W×262등	7 (보도 3개 포함	6	24

□ 대상 및 내용

○ 위 치 : 난곡터널 상행

○ 대 상 : 조명시설, CCTV

○ 내 용

- 방음벽 내측에 설치된  CCTV는 맞은편으로 이설

- 방음벽 상부 케이블 트레이 및 터널등 상향 설치

2		사업 추진계획

□ 조명시설

○ 추진방향

- 기존 터널등(나트륨등)은 LED로 교체 설치

- 케이블(상행 전체) 및 케이블 트레이(상행 우측)는 교체

※ 상행좌측 케이블트레이 재사용

○ 사 업 비 : 250백만원(도급비 130백만원, 관급자재비120백만원)

○ 공사발주 : 제한경쟁입찰(지역제한)

○ 관급자재 : 조달구매(3자단가)

- 제품선정위원회 개최 후 선정된 제품 구매

○ 공사 입찰참가자격

- 전기공사업법에 의한 전기공사업면허 등록업체로서 입찰공고일 전일부터 입찰일 까지 주된 영업소의 소재지가 서울특별시에 소재한 업체

○ 예산과목

- 도로시설물 관리, 터널시설관리, 난곡터널보수, 시설비 및 부대비, 시설비

□ CCTV

○ 추진방향

- 터널 내 카메라 재사용 및 맞은편으로 이설

- 전원 케이블(상행) 및 조작케이블 교체

○ 사 업 비 : 20백만원

○ 공사발주 : 전자공개 수의계약

○ 공사 입찰참가자격

- 정보통신공사업법제14조에 의해 정보통신공사업면허등록한 자로 입찰등록일 현재 서울시에 주된 사무실을 등록한 업체

○ 예산과목

- 도로시설물 관리, 터널시설관리, 난곡터널보수, 시설비 및 부대비, 시설비

□ 예산 사항

○ 소요예산 : 270백만원

- 조명시설 이설 : 250백만원(공사비 130백만원, 관급비 120백만원)

- CCTV 이설 : 20백만원

○ 예산 확보내역 : 160백만원

- 시설보수과 난곡터널 보수공사 이전비

○ 부족예산(관급비) 조치 : 120백만원

- CCTV 이설 및 조명시설 이설공사는 시설보수과 예산으로 집행

- 조명시설 공사 관급자재비는 도로시설과에 예산 재배정 요청 후 시행.

3		추진 일정

○ 2018. 6.     추진계획 수립

○ 2018. 6.     공사발주 및 관급자재 선정위원회 개최

○ 2018. 7.~8  공사 시행

○ 2018. 9      공사 준공

4		향후 계획

○ 도로시설과 예산 재배정 요청(120백만원)

○ 터널등 구매 전 제품 선정위원회 개최

○ 방음벽 내부조명(보행등)은 난곡터널 보수공사 완료 후 집행 잔액을 이용 설치 예정

○ 하행 조명개선은 2019년 예산 편성하여 추진

붙임 : 1. 터널등 설계 내역서 1부.

2. CCTV 이설 설계 내역서 1부.  끝.