문서번호	토목부-10066
결재일자	2018.6.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
박운용		명경출	06/11 김영수
협조

금하지하차도 물푸기 수량 검토보고

- 강남순환도시고속도로(4공구) -

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 6

도시기반시설본부

(토 목 부)

-강남순환도시고속도로(4공구)-

금하지하차도 물푸기 수량 검토보고

○ 금하지하차도 물푸기 설계수량은 지하차도 터파기 기간만 산정되어 있어 구조물 시공기간 물푸기 반영이 필요한 실정임. 공사비 증액 최소화하는 방안으로 물푸기 수량 검토 보고드림.

공사개요

❍  위    치 : 금천구 독산동～ 광명시 소하동 ~ 금천구 시흥동

❍  규    모 : 폭 4~8차로, 연장 2.48km

❍  총사업비 : 3,856억원(도급비 1,952억원)

❍  공사기간 : □01. 12. 29. ～□19. 11.30.(민자구간 개통 □16. 7.3.)

❍ 시공사/건설사업관리단 : 롯데건설㈜ / ㈜서영엔지니어링

건설사업관리단 검토의견

❍ 금하지하차도 물푸기 시간은 토공 터파기 기간만 설계에 반영되어 있으며, 구조물 시공 기간에도 물푸기 작업이 병행되어야 하므로, 물푸기 시간의 변경이 필요한 실정임.

※ 원설계자 의견(토목구조기술사 송봉섭)

- 2016년 개정된 “국도건설공사 설계실무 요령” 에 따라서 콘크리트 양생 및

거푸집해체 시에도 물푸기시간을 반영하는 것이 타당하다고 판단 됨.

❍ 금하지하차도 양수기 실배치 운영현황(총8대)

❍ 물푸기 수량 관련규정 검토

기 준	물푸기 실기간 적용 (지하철 적산 단가 562천원/24hr)	물푸기 실기간 적용 (표준시장단가 179천원/24hr)	국도설계실무요령 적용 (기계약단가 179천원/24hr)
내 용	① 물푸기 시작일 2016. 01. 31	① 물푸기 시작일 2016. 01. 31	① 지하수위 이하 터파기 물푸기 시간 (3,725hr)
	② 물푸기 종료일 (되메우기 완료일) 2019. 09. 30	② 물푸기 종료일 (되메우기 완료일) 2019. 09. 30	② 지하차도 블록별 구조물 시공시간 (14,280hr) - 철근·거푸집 조립 및 콘크리트 타설 - 콘크리트 양생, 거푸집해체
	③ 전체 물푸기 기간 1,339일(32,136hr)	③ 전체 물푸기 시간 1,339일(32,136hr)	③ 전체 물푸기 시간 750일(18,005hr)
공사비	752백만원	240백만원	134백만원

❍ 수량 증·감 현황

구 분	당 초	변 경	비 고
시 간	- 토공 터파기 기간 : 3,725 hr - 구조물 시공 기간 : - hr	- 토공 터파기 기간 : 3,725 hr - 구조물 시공 기간 : 14,280 hr	국도설계실무요령
계	3,725 hr	18,005 hr(증 14,280 hr)

❍ 공사비 증·감현황

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감
직 공 비	21,378	103,331	81,953
제 잡 비	6,322	30,969	24,647
총공사비	27,700	134,300	106,600

(단위 : 천원)

검토의견

❍ 금하지하차도 물푸기 수량을 관련규정에 따라 검토한 결과, 건설사업관리단의 실정보고가 타당하므로 추후 설계변경시 반영코자함.

붙임 : 건설사업관리단 검토의견서 1부. 끝.