투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	건설사업 관리용역 설계변경 계약 의뢰(중랑천 초안산 보행교량-전체2회,3차1회)

우리 본부에서 시행중인 『중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사 건설사업 관리용역』에 대해 아래와 같이 설계변경(전체2회, 3차1회) 계약의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사 건설사업 관리용역

나. 용 역 비 : 761,190천원(3차 : 261,190천원)

다. 용역기간 : ‘16.5.16.∼’18.6.15.(3차:‘17.1.16.∼’18.6.15.)

라. 용역업체 : ㈜ 대한콘설탄트 외1

마. 예산과목 : 하천관리과, 치수 및 하천관리, 하천복원 및 정비(일반회계), 중랑천

초안산 앞 보행교량 설치, 감리비

바. 설계변경(전체 2회, 3차 1회)

(단위 : 원)

구 분	전체분(2회)		3차분(1회)		비고
	당 초	변 경	당 초	변 경
용 역 비	761,190,000	900,000,000	261,190,000	400,000,000
용역기간	‘16.5.16∼’18.6.15	‘16.5.16∼’18.12.31	‘17.11.8∼’18.6.15	‘17.11.8∼’18.12.31

사. 설계변경 사유

- 월계역사 연장 추가공사로 본공사 연기에 따른 감리기간 연장 및 투입기간 조정

붙임 : 1. 설계변경 방침서 및 감리검토 의견서 각 1부.

2. 설계변경 내역서(전체 2회, 3차 1회) 각 1부.

3. 합의각서 각 1부.  끝.

	토목부장
주무관	노순재		교량건설과장	박용택		토목부장	06/11 김영수
협조자
시행	토목부-10037	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2578	/전송	02-3708-2599	/	fortuners@seoul.go.kr	/	대시민공개