문서번호	시설보수과-4649
결재일자	2018.6.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	서부도로사업소장
이동섭		신동헌	06/12 이학구
협조
	주무관		권순회

사천교 확장 및 성능개선공사(장기계속)

준공 검토 보고

2018. 6

서부도로사업소

(시설보수과)

사천교 확장 및 성능개선공사(장기계속)

준공 검토 보고

가재울뉴타운 3,4구역 주택재개발 정비사업에 따른 수색로의 교통혼잡 개선과 장기적인 교량의 안전성 및 내구성 확보를 위하여 시행한 「사천교 확장 및 성능개선공사(장기계속)」를 완료하고 감리단으로부터 준공검사 결과가 제출되어 검토 보고함.

	공사개요

○ 공 사 명 : 사천교 확장 및 성능개선공사(장기계속)

○ 공사기간 : 2016. 4. 12 ~ 2018. 5. 30

○ 계 약 자 : 신안종합건설 대표 박순석

○ 계약금액 : 3,612,259천원

○ 공사규모 : 교량확장 폭30m→37m, 연장 90m

성능개선 폭 10m, 연장 90m, DB18→DB24

○ 건설사업관리단 : 한국건설관리공사 / ㈜대한콘설탄트

	주요 추진경위

○ 확장공사

- 2016. 04월 : 공사 착공

- 2016. 10월 : 하부 기초파일 시공 완료

- 2017. 03월 : 교각 및 교좌장치 시공 완료

- 2017. 06월 : 상부 거더 거치 및 슬래브 타설 완료

○ 성능개선공사

- 2017. 09월 : 구교(2교) 상부 슬래브 철거완료

- 2017. 12월 : 상부 거더 거치 및 슬래브 타설 완료

- 2018. 05월 : 교면포장 및 신축이음장치 등 시공 완료

	공사 세부 추진현황

○ 전체 시공 단면도

확장구간	기존교량	성능개선구간	기존교량	확장구간

○ 확장공사 현황

구 분	연장 (m)	폭원 (m)	하부구조			상부구조
			기초	교각	교대
수색방향 연희IC방향	77.5 90.0	3.5 3.5	강관 파일	T형	역T형	Preflex+SPC

※ 차로수 : 수색방향(2→4차로), 연희I/C방향(4→5차로)

- 주요 시공내역

구 분	형식 / 적용공법	시 공 내 용
기 초	강관파일 / SDA공법	- 교대 : 파일 8EA × 3개소 (깊이 : 11m) - 교각 : 파일 6EA × 7개소 (깊이 : 9.5∼10.5m)
교각/코핑	T형 / 철근콘크리트	- 내진보강 : 띠철근과 심부 구속철근
교좌장치	탄성받침	- 450kN∼2000kN (38EA : 고정5, 일방19, 양방14)
주 형	SPC / Preflex 거더	- SPC 설치 : 하류 A1∼P1, P4∼A2 (3EA×2경간) 상류 P4∼A2 (3EA×1경간) - PF빔설치 : 상류 P1∼P4 (2EA×3경간) 하류 P1∼P4 (2EA×2경간)
슬래브	철근콘크리트	- 교폭 3.5m×2개교(상·하류), 바닥판 두께 25cm
기 타	신축이음 장치 차량방호책 교량난간	- NMC-No.50 (New Monocell Joint) 24m - SB4등급, 높이 85cm - 알루미늄, 높이 120cm

- 시공사진

<기초파일 시공>	<주형 거치>	<확장 완료>

○ 성능개선공사 현황

구 분	연장 (m)	폭원 (m)	하부구조		상부구조
			교각	교대
구교(1교) (‘62년 준공)	90.0	10.0	단면확대 보강	단면확대 보강	Preflex+SPC

- 주요 시공내역

구 분	형식 / 적용공법	시 공 내 용
교각/코핑	단면확대 보강	- 철근보강 및 콘크리트 단면 확대보강
교좌장치	탄성받침	- 450kN∼1750kN (52EA : 고정3, 일방24, 양방25)
주 형	SPC / Preflex 거더	- SPC 설치 : A1∼P1, P4∼A2 (9EA×2경간) - PF빔설치 : P1∼P4 (2EA×3경간)
슬래브	철근콘크리트	- 교폭 10m, 연장 90m, 바닥판 두께 25cm
기 타	신축이음 장치 교면포장 배수시설	- 횡방향 : NMC-No.50 120m 종방향 : NMC-No.30 180m - 아스콘, 두께 8cm (4cm×2회) - 알루미늄, Φ150mm

- 시공사진

<슬래브 철거>	<주형 거치>	<성능개선 완료>

	준공 검토보고

○ 금회 준공기성(2차3회) 금액 : 604,159천원(16.7%)

○ 주요 시공내역

- 기존교량 슬래브 손상부 단면보강 30㎡

- 교면방수 및 포장 18a, 교량인접 토공부 도로 아스콘 재포장 24a

- 신축이음장치 설치 300m (종방향 180m, 횡방향 120m)

- 교량 하부 콘크리트 중성화방지 보수 4,007㎡

- 기타 교통안전시설, 보행안전도우미 등 부대공 및 제경비 정산

○ 차수별 예산 집행 현황

(단위:천원)

구 분	계약금액	전회 기성액	금회 기성액	기성잔액	비고
총차	3,612,259	3,008,100	604,159	-
1차	1,764,000	1,764,000	-	-	준공
2차	1,848,259	1,244,100	604,159	-	준공
집행율		83.3%	16.7%	-

	조치의견

○ 상기 보고내용과 같이 사천교 확장 및 성능개선공사 건설사업관리단으로부터 보고된 준공검사 결과에 대하여 현장 시공 확정분 기성 반영 내역과 관련 준공도서 등을 확인한 결과,

○ 기 집행된 기성부분 외 잔여 물량 시공분 정산내역이 적정한 것으로 판단되며,

○ 예비준공검사와 사전 발주처 합동점검 시 일부 지적사항에 대하여 조치를 완료 하였으므로 이상 없이 준공 처리코자 함.

붙임 : 1. 시공사 준공검사원 및 감리단 준공검사 결과보고 1부.

2. 준공(정산) 내역서 1부.

3. 예비준공검사 및 발주처 합동점검 지적사항 조치결과 1부.  끝.