과 장		06/12 권태선	심사자	신동헌		설계자	이철형		설 계	심 사		결 재
									2018년 6월	2018년 6월
설 계 변 경 내 역 서(1회)
	공 사 명 : 도림천1복개 보수공사
	구 분				당 초			변 경			비 고
	총 공 사 비				527,593,000			527,593,000
	도급비	공 급 가 액			466,830,910			378,544,182
		부 가 가 치 세			46,683,090			37,854,418
		계			513,514,000			416,398,600
	관 급 비				-			88,719,400
	이 전 비				14,079,000			22,475,000
당초 변경 절삭후아스팔트덧씌우기 61.77a → 절삭후아스팔트덧씌우기 43.78a 교면 방수 4,301.52㎡ → 교면 방수 2,502.00㎡ 신축이음장치보수 133.9m → 신축이음장치보수 0.0m 단면보수 100.75㎡ → 단면보수 54.60㎡ 균열보수 169.30m → 균열보수 31.20m 표면보수 -㎡ → 표면보수 2,845.0㎡

붙 임  설계내역서 1부.  끝.