문서번호	도로보수과-5358
결재일자	2018.6.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	서부도로사업소장
임동운		강종훈	06/14 이학구
협조
	주무관		이상하

2018년 도로함몰 예방사업(서부)  설계변경(제1회) 시행계획 보고

2018. 6.  .

서부도로사업소

(도로보수과)

설계변경 시행계획(제1회)

우리사업소에서 시행중인 「2018년 도로함몰 예방사업(서부)」와 관련기 발주된 물량외에 예기치 못한 동공 발생에 따른 원인조사 및 도로복구을 위하여 낙찰차액을 사용 설계변경(제1회) 시행하여 도로함몰 예방에 만전을 기하고자 함.

□ 관련근거

○ 2018년 도로함몰 예방사업 시행계획 보고

[도로보수과-2325(‘18. 3.15)]

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2018년 도로함몰 예방사업(서부)

○ 공사기간 : 2018. 3.26 ~ 12.31

○ 시 공 사 : **************

○ 총공사비 : *********

*************************************************************

□ 보고내용

○ 서울특별시 도로관리과 탐사 동공에 대한 기 조사대상 구간 77개소 및 동공 발생 구간에 대하여 작업완료 하였으나

○ 자체조사 및 향후 예기치 못한 긴급 동공, 함몰 발생시 원인조사 및 도로복구를 위하여 추가 예산 확보가 필요 함

□ 조치계획

○ 상기 보고내용과 같이 긴급 도로동공, 함몰 예방 등을 위하여 낙찰차액(83,063천원)을 사용하여 『2018년 도로함몰 예방사업(서부)』의 설계변경(제1회)을 시행하여 도로함몰 예방에 만전을 기하고자 함.

○ 설계변경금액                                          (단위:원)

구 분	설계 변경 금액(1회)
	당초금액	변경금액	증 ․ 감
총공사비	376,936,500	***********	************
도 급 비	*318,766,500	***********	************
관 급 비	************	**********	************
이 전 비	************	***********	-

○ 주요공종변경수량

주요공종	단위	설계 변경 물량(1회)			비고
		당초물량	변경물량	증‧ 감
긴급굴착복구(함몰,동공)	개소	77	107	증) 30

○ 예산과목 : 도로관리과, 도로, 도로시설물관리, 도로 및 도로부속시설물,

도로함몰예방사업, 시설비

붙임 1. 2018년 도로함몰 예방사업 시행계획 보고. 1부.

2. 설계변경내역서 1부.  끝.