문서번호	시설과-5514
결재일자	2018.6.14.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	시설안전부장
윤걸		송병욱	06/14 강신재
협조

「낙산배수지 건설공사」

폐기물 발생에 따른 처리방안 실정 보고

2018. 6.

상수도사업본부

(시설과)

「낙산배수지 건설공사」

폐기물 발생에 따른 처리방안 실정 보고

「낙산배수지 건설공사」터파기 공사중 폐콘크리트 및 폐토사가   추가·신규 발생됨에 따라 폐기물 처리방안을 보고 드림.

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 낙산배수지 건설공사 건설폐기물 처리용역

○ 용역기간 : 2018. 3. 14.~2020. 7. 13.

○ 용 역 비 : 46,982,800원

○ 용 역 사 : ㈜동보이앤시 대표 김지환

□ 보고요지

○ 배수지 터파기 중 예측하지 못한 폐콘크리트, 폐토사 발생으로 인한 폐기물 처리 물량 변경

- 발생 폐기물 : 폐콘크리트 210㎥, 폐토사 747㎥

○ 용역비 변경 현황

구 분	당 초	변 경	증·감
매립 폐기물 철거	0원	67,287,000원	증 67,287,000원

□ 실정보고 내용 검토

1. 배수지내 폐기물 추가 발생

○ 매립 폐콘크리트 추가 발생

- 배수지 터파기 중 당초 설계와 달리 무근 및 철근 폐콘크리트 추가 발생

- 폐콘크리트 추가 발생량 : 210㎥, 500Ton

· 무근 폐콘크리트 (45㎥, 103Ton), 철근 폐콘크리트 (165㎥, 397Ton)

○ 매립 폐토사 신규 발생

- 배수지 터파기중 각종 폐기물(폐콘크리트 등)이 섞인 폐토사 신규 발생

- 발생된 폐토사에 대하여 토사반출 가능 여부를 확인하기 위해 수도권매립지관리공사에 발생 토사를 2회에 걸쳐 의뢰함

⇒ 매립지관리공사 회신 : 폐기물이 혼입된 토사는 반입 불가, 양질토 반입 가능

※ 관련공문 : 매립지관리공사 매립관리처-1710(토사 조건부 반출 협조요청)

- 폐토사 신규 발생량 : 747㎥, 1,270Ton

폐콘크리트 구간 양질토 구간 폐토사 구간		폐콘크리트 구간 15.2m×19.07m 2. 양질토 구간 폐콘크리트 발생구간과 폐토사 발생구간에서 제외한 구간에서 발생 3. 폐토사 구간 전면적에서 발생
당초 설계(폐콘크리트+토사)	현장 실정(폐콘크리트+폐토사+토사)
철근 폐콘크리트(T=0.4m) 추가 발생	폐기물 혼입토사 : 매립지 반입불가 회신

2. 추가 발생 폐기물처리 비용 산출

○ 폐기물 추가 처리 비용 : 약 67,287,000원(폐기물처리 계약금액 초과)

- 폐기물운반비 : 20,792,739원(폐콘크리트 : 210㎥, 폐토석 : 747㎥)

- 폐기물처리비 : 36,647,110원(폐콘크리트 : 500Ton, 폐토석 : 1,270Ton)

- 제   잡   비 : 9,847,151원

공종명	규 격	단위	당 초		변 경		증 · 감		비고
			수량	금액	수량	금액	수량	금액
합 계						67,287,000		67,287,000
폐기물운반비						20,792,739		20,792,739
폐콘크리트운반		㎥			210	4,562,670	210	4,562,670
폐토사운반		㎥			747	16,230,069	747	16,230,069
2. 폐기물처리비						36,647,110		36,647,110
폐콘크리트처리비		Ton			500	8,779,500	500	8,779,500
폐토사처리비		Ton			1,270	27,867,610	1,270	27,867,610
3. 제잡비						9,847,151		9,847,151

3. 추가 발생 폐기물 처리 방안

○ 제1안 : 기존 폐기물처리용역업체((주)동보이앤시)에 의뢰하여 처리

- 기존 계약된 폐기물처리용역 업체에 추가 발생된 폐기물 처리를 의뢰

- 신속한 폐기물 처리로 원활하고 신속한 공정진행 가능

○ 제2안 : 폐기물처리용역 신규 발주

- 신규 폐기물처리용역을 발주하여 낙찰된 업체에 처리의뢰.

- 용역 신규 발주시 약 2개월의 행정절차 이행으로 배수지 공사 중지 불가피

□ 건설사업관리기술자 검토의견

○ 건설사업관리단 의견 : 제1안

- 공정율이 6월 1일 현재 부진한 실정(계획 대비 74.52%)이며 폐기물처리용역 신규 발주시 행정절차 이행에 2개월이 소요될 것으로 판단됨.

- 폐기물처리가 선행되지 않으면 차기 공정진행이 불가하므로 기존 폐기물처리용역업체에 의뢰하여 처리하는 제1안이 타당할 것으로 판단됨.

○ 상기 검토내용과 같이 본 현장의 원할한 공정진행을 위해 현재 계약된 폐기물처리업체에 추가 발생 폐기물을 처리토록 하고 공종별 수량 및 공사비 변경분에 대하여 설계변경 시 반영함이 적정함.

□ 조치의견

○ 상기와 같이 터파기 중 발생된 매립폐기물 철거에 따른 폐기물 처리 실정보고 건은 건설사업관리기술자의 검토내용이 타당하고 공사계약 일반조건에 적정하므로 실정보고 사항을 승인코자 하며, 추후 “본부 재무회계과”를 통한 계약금액 조정 검토 후 설계변경에 반영코자 합니다.

붙임 : 감리단 실정보고 1부.  끝.