＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	남부수도사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	공사현장 실정보고서 검토결과 통보

1. 공사감독2처-6672(2018.6.14.)호와 관련입니다.

2. 우리사업소에 승인 요청한 공사현장 실정보고서에 대해 다음과 같이 통보하오니 공사         시행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 보고내용 및 검토결과

구분	공종	시설공단 보고 내용	우리사업소 검토 의견
1	횡단굴착 개소 증가 “2~4구간”	● 2~4구간 횡단굴착 시행중 지장물(통신,가스,하수도 등)이 많아 관로의 선형을 계획하는데 어려움이 있어 추가 횡단굴착(16개소)이 필요함 ▶ 개략공사비 : 증)2,700천원	●『타당함』 ▶ “2~4구간”의 세부적인 지장물 조사 및 관로 선형을 위해 추가 횡단굴착 시행 (당초 31개소 → 변경 47개소)
2	굴착심도 조정 “2구간”	● 2구간중 일부구간(총270m 중 110m)이 보도 측구 에서 도로중앙선 하부로 매설된 하수박스로 인하여 하수박스 상단에 부설해야 하는 실정으로 굴착심도 를 당초 1.43m에서 1.2m로 조정하여 관로 시공 ▶ 개략공사비 : 감)1,981천원	●『타당함』 ▶ “2구간” 일부구간(총270m중 110m)이 하수 박스 상단 부설에 따른 굴착심도 조정 (당초 1.43m → 변경 1.2m)

끝.

	남부수도사업소장
주무관	김재엽		주무관	강동길		급수운영과장	06/15 이성환
협조자
시행	급수운영과-11879	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/
전화	3146-4557	/전송	3146-4589	/	yeup2424@seoul.go.kr	/	대시민공개