문서번호	설비부-8130
결재일자	2018.6.15.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
정찬교		오삼록	06/15 권오식
협조

『남산예장자락 재생사업 통신공사』

실정보고에 대한 검토보고

2018. 06.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『남산예장자락 재생사업 통신공사』

실정보고에 대한 검토보고

『남산예장자락 재생사업 통신공사』소방재난본부 리모델링 관련, 건축 공사범위 확대 및 운영자 요구사항에 따른 통신설비 추가 설치에 대하여 검토보고 함.

1		공사개요

□  공 사 명 : 남산예장자락 재생사업 통신공사

□  규 모 : 지하주차장(버스39면, 일반2면) 5,679m2, 부대시설 1,532m2

□  공사기간 : `17.08.01~`19.1.31(`19.12.31로 연기 예정)

□  공 사 비 : ************************

□  시 공 사 : *******

□  감 리 사 : ㈜동성엔지니어링

□  공 정 률 : 4%(소방재난본부 리모델링 입선 진행)

2		관련근거

□ 남산예장 감리-170호(`18.06.11) : 건설사업관리단 실정보고서 제출

3		실정보고 내용

□  주요변경 내용(소방재난본부 리모델링)

공 종	변경내용	변경사유	증·감(천원)
구내 통신설비	·천정형 스피커 증)6개	·건축 천장 보수범위 확대에 따른 스피커 설치	증)4,643
	·모듈라짹 2구 증)4개 ·TV 수구 증)1개 ·UTP케이블 4p 증)74m ·UTP케이블 25p 증)168m	·운영자 요구사항 반영하여 식당에 통신(인터넷)사용 및 TV시청 가능하도록 수구 설치
간접비(부가세 포함)			증)2,122
도급금액			증)6,765

□  건설사업관리기술자 의견

○ 공사진행에 따른 현장조사 후 각 사항에 대한 도면 및 내역을 검토한 결과           건축 천장 보수범위 확대에 따른 스피커 교체, 운영자 요구사항에 따라 식당           부분 통신수구 설치하는 것이 리모델링을 위하여 필요한 사항으로 판단 됨.

4		보고자 의견

□ 건설사업관리 기술자의 실정보고 내용이 타당하므로 실정보고 승인하고,        추후 설계변경 시 내역 반영하고자 함.

붙임 : 감리단 공문 1부. 끝.