문서번호	시설과-2610
결재일자	2018.6.15.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	시설과장	경영지원부장
강신영	박관현	06/15 송임봉
협 조

2018년도 박물관 전기설비 개량 11차 작업계획 보고

2018. 6.

서울역사박물관

(경영지원부 시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	■	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2018년도

박물관 전기설비 개량 11차 작업계획 보고

2018년도 박물관 전기설비 개량 11차 작업계획을 아래와 같이 보고 드림

Ⅰ		사업현황

□ 사업내용: 분전반 교체 85면, 디밍판넬 개량 9면,
케이블 13.1km 철거 후 41.3km 신설

□ 추진현황

- 1차~10차 작업 완료: 취부판 및 분전반 76면 교체(4/1~6/11)

- 디밍판넬 9면 개량 완료(4/30)

Ⅱ		11차 작업 계획

□ 작업내용

- 취부판 및 분전반 5면 교체(LE-1A, 1A-A, MA, MB, ELEV-BB)

- 전시과 쪽 사무실 전열선로 보강 작업

□ 작업일시(작업여건에 따라 종료시간 변동가능)

- 취부판 및 분전반 4면 교체: ************************

- 분전반 1면 교체 및 사무실 전열선로 보강 작업: ************************

□ 작업일정

일 시	공 종	대상 물량	비 고
************ ***********	***** ******	*******************	*************************************
************ ***********	*********************	************* ******	***************************

Ⅲ		행정사항

□ 해당일별 작업에 따른 사전준비 및 안내 철저

일 자	중점사항
*********	**********************
*********	**********************************

□ 원활한 케이블 철거설치를 위해서 케이블 관로 위치 및 연결부하에 대한 정확한 파악이 필수이므로, 금번 판넬 교체작업을 위한 정전시 해당구간 선로 확인작업을 병행

Ⅳ		향후계획

□ 사업추진 과정에서 발생하는 변동사항에 대한 적기 실정보고 실시
및 변경계약 시행.  끝.