투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	준공기한 연기요청(우포늪생태체험장 내 서울숲 조성사업)

『우포늪생태체험장 내 서울숲 조성사업』추진과 관련하여 아래와 같이 준공기한을 연기하고자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 사 업 명 : 우포늪생태체험장 내 서울숲 조성공사

2. 도 급 액 : 금206,358,000원(금이억육백삼십오만팔천원)

3. 공사기간 : 2018.5.9. ~ 2018.6.17.

4. 도 급 자 : 세신조경주식회사 대표 서종원

5. 준공기한 연기

가. 당초 : 2018.5.9. ~ 2018.6.17.

나. 변경 : 2018.5.9. ~ 2018.6.29.

붙임 : 준공기한 연기의뢰서 1부.  끝.

	시설과장
주무관	송재민		조경팀장	이무림		시설과장	06/15 김재균
협조자
시행	시설과-2673	(		)	접수		(		)
우			/	http://parks.seoul.go.kr
전화		/전송		/		/	부분공개(5)