문서번호	시설과-2683
결재일자	2018.6.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	조경팀장	시설과장	중부공원녹지사업소장
송재민	이무림	김재균	06/15 이춘희
협 조

출 장 결 과 보 고

(우포늪 생태체험장 내 서울숲조성공사)

2018. 6.

중부공원녹지사업소

(시설과)

출장 결과보고(우포늪 생태체험장 내 서울숲 조성 공사)

우포늪 생태체험장 내 우리시와 창녕군 간 우호교류협력 사업으로 추진중인 서울 숲 조성 공사 현장 출장결과 보고임.

Ⅰ 출 장 개 요

○ 일    자 : 2018.6.14.(목), 09:00~18:00

○ 출 장 지 : 우포늪 생태체험장(경남 창녕군 대합면 우포2로 370)

○ 출 장 자 : 시설과장 김재균, 녹지8급 송재민

○ 출장목적 : 서울숲 조성 공사 현장 확인 및 업무협의

Ⅱ 출 장 내 용

○ 공사 관련 업무 협의

- 우포늪 생태체험장 내 이정표에 서울숲 표기 요청(창녕군 시행)

- 관찰데크 내 안전사고 예방을 위한 시설물 설치

- 남산소나무 경관에 저해되는 버드나무 이식 위치 협의 등

Ⅲ 검 토 의 견

○ 공사 현장 여건에 따른 설계 변경 필요

- 관찰데크 내 안전사고 예방을 위한 강화유리 설치 필요

- 남산소나무 경관을 저해하는 생태체험장 내 버드나무 이식 반영 등

- 본 공사의 집행잔액 및 낙찰차액을 활용하여 설계변경

○ 공사기간 연장

- 관찰데크 내 강화유리 설치 및 버드나무 이식 등에 따른 공기 연장

- 당 초 : 5. 9. ~ 6.17. ⇒ 변 경 : 5.9. ~ 6.29.

붙 임 : 현장 사진 1부.  끝.