투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	서울숲야외무대 재정비 조명설치공사 설계변경 의뢰

1. 시설과-292(2018.02.09.)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소에서 추진 중인 『서울숲야외무대 재정비 조명설치공사』에 대하여 아래와 같이 설계 변경하여 준공처리코자 합니다.

가. 공 사 명 : 서울숲야외무대 재정비 조명설치공사

나. 총공사비 : 금8,960,000원(금팔백구십육만원)

다. 공사기간 : 2018. 02. 22. ~ 2018. 6.18

라. 도 급 자 : 청목이앤아이(주) 김희경

마. 공사비 변경내역

(단위 : 원)

구분		당초	변 경	증/감	비고
전기	도급액	8,960,000	11,120,000	2,160,000
	조달구매	10,659,400	14,913,190	4,253,790
	소계	19,619,400	26,033,190	6,413,790

바. 예산과목

- 푸른도시국공원녹지정책과, 공원녹지개발및만족도개선, 공원유지관리및이용활성화, 시공원유지관리, 시설비 및 부대비, 시설비(401-01)

붙  임 : 1. 설계변경 보고서 1부.

2. 변경 내역서 1부. 끝.

	시설과장
주무관	강희진		시설관리팀장	장창원		시설과장	06/15 진병규
협조자
시행	시설과-1349	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로20길 33 (신대방동)	/
전화	02-2181-1156	/전송	02-2181-1169	/	jhg815@seoul.go.kr	/	부분공개(6)