문서번호	토목부-10344
결재일자	2018.6.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
남덕희		명경출	06/18 김영수
협조
	주무관		박운용

박미지하차도 교통안전시설물 설치 검토보고

- 강남순환도시고속도로(4공구) -

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 6

도시기반시설본부

(토 목 부)

-강남순환도시고속도로(4공구)-

박미지하차도 교통안전시설물 설치 검토보고

시흥3동 박미지하차도 개통 관련 금천구청, 금천경찰서 협의결과에 따라 교통안전시설물(교통표지판, 시선유도봉, 차선도색 등) 추가 설치사항 검토 보고 드림

공사개요

❍  위    치 : 금천구 독산동～ 광명시 소하동 ~ 금천구 시흥동

❍  규    모 : 폭 4~8차로, 연장 2.48km

❍  총사업비 : 3,856억원(도급비 1,952억원)

❍  공사기간 : `01. 12. 29. ～ `19. 11.30.(민자구간 개통 `16. 7.3.)

❍ 시공사/건설사업관리단 : 롯데건설㈜ / ㈜서영엔지니어링

추진경위

❍ '18.02.01 : 교통안전시설물 심의위원회 상정요청(토목부→금천경찰서)

❍ '18.02.05 : 교통안전시설물 설치 승인통보(금천경찰서→토목부)

❍ '18.02.08 : 교통안전시설물 협의 요청에 대한 검토의견 회신

(금천구 교통행정과→토목부)

❍ '18.02.12 : 교통안전시설물에 대한 협의 회신(금천구 도로과→토목부)

❍ '18.03.02 : 박미지하차도 개통

건설사업관리단 검토의견

❍ 박미지하차도 개통 관련 금천구청, 금천경찰서 협의결과에 따라 적용하여 산출한 교통안전시설물 설치에 대하여 시공사의 실정보고 수량 및 공사 금액을 검토한 결과 적정한 것으로 판단됨

❍ 검토내용

- 교통안전 시설물 설치에 대한 유관기관 협의 결과 반영설치

❍ 수량 증·감 현황

공 종	단위	당초	변경	증·감	비고
시선유도봉	ea	0	23	23
이미지휀스(1,768*1,100)	m	0	118	118
반사거울	개	0	2	2
교통표지(삼각,오각,LED)	개소	0	26	26
차선도색(융착식,수동식)	m	628	831	203

❍ 공사비 증·감 현황

(단위 : 천원)

비 목	당 초	변 경	증․감	비고
순공사비	1,969	39,798	37,829
제 잡 비	431	7,702	7,271
총공사비	2,400	47,500	45,100

❍ 단가적용

- 기존비목은 기계약단가 적용, 신규비목은 설계단가에 기협의율(84.64%)적용

검토의견

❍ 박미지하차도 개통을 위해 관련기관(금천구청, 금천경찰서)과 협의하고 그 결과를 반영하여 시설물운영, 이관하고자 하는 사항으로 건설사업관리단의 실정보고는 적정하므로 추후 설계변경시 정산 반영코자 함

붙임 : 건설사업관리단 검토의견서 1부. 끝.