문서번호	시설보수과-4501
결재일자	2018.6.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	북부도로사업소장
이택호		代김영원	06/18 신응수
협조

미집행 예산(낙찰차액) 활용계획 보고

(노원교 인도확장공사)

2018. 6.

북부도로사업소

( 시 설 보 수 과 )

미집행 예산(낙찰차액) 활용계획 보고

(노원교 인도확장공사)

노원교 인도확장공사와 관련하여, 위탁감독 수행중인 시설관리공단으로부터 제출된 실정보고 사항에 따른 낙찰차액 활용계획 보고임.

관련근거

지방자치단체 세출예산 집행기준(행정자치부 예규 제74호, 2016.12.27.)

- Ⅲ. 비목별 세부집행지침 13-1. 시설비(401-01): 동일 편성목 내의 낙찰차액 집행가능

공사개요

공 사 명 : 노원교 인도확장공사

계약금액 : 449,008,000원

공사기간 : 2018. 4. 16. ∼ 2018. 12. 31.

공사개요 : 캔틸레버 인도확장 123m, 목재데크 설치 488㎡

계 약 자 : 해주건설㈜ 대표 신진하

예산 현황                                        (단위 : 천원)

사 업 명	구 분	발주금액	계약금액	낙찰차액	비 고
노원교 인도확장공사	도급비	537,160	449,008	88,152

미집행 예산(낙찰차액) 활용사유

공단 제1회 실정보고 반영(비계형식 변경)

- 당초 노원교 하부 중랑천상에 강관비계를 설치하여 공사하도록 설계되어 있으나, 수방기간중 하천의 영향을 받아 공사가 어려워 공중비계로 변경 설치

- 시설관리공단 공사감독2처-4480(2018.5.15.) ☞ 계략공사비 증)12,250천원

공단 제2회 실정보고 반영(난간설치 물량증가)

- 기존 난간이 설치된 115m 구간은 재활용하여 이설하는 것으로 설계되어 있으나 난간 앙카볼트의 녹발생, 앙카박스 손상 등 재사용이 어려운 실정으로 신설 난간 설치

- 시설관리공단 공사감독2처-5869(2018.6.4.) ☞ 계략공사비 증)53,000천원

소장님 지시사항 반영(인도부 방수 등)

- 교량 인도부의 원활한 배수를 위하여 교면방수 및 구배몰탈 타설

- 신축이음 끝단부 파손, 받침 베이스판 부식방지를 위한 보수

☞ 계략공사비 증)9,700천원

조치계획

추가 소요되는 공사금액은 현재 시행중인 공사의 낙찰차액(88,152,000원)을 활용 공사시행 하고 추후 설계변경시 반영하고자 함.

신설 난간 설치건에 대하여 특정제품선정 심사위원회 개최 예정(별도 계획보고)

붙임 : 실정 보고서 각 1부.