문서번호	백제학연구소-724
결재일자	2018.6.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		백제학연구소장	한성백제박물관장
이혁희		조영훈	06/18 이인숙
협조	총무과장		오천석
	주무관		박중균

몽촌토성 북문지 일원 발굴 조사

유구(집수지)보호시설 설치 계획

2018. 6.

한성백제박물관

(백제학연구소)

몽촌토성 북문지 일원 발굴조사

유구(집수지)보호시설 설치 계획

“몽촌토성 북문지 일원 발굴조사”에서 확인된 “삼국시대 집수지”의 유구보호 및 원활한 발굴조사를 위하여 유구보호시설(지붕)을 설치하고자 함.

Ⅰ		사업 개요

❍ 사 업 명 : 몽촌토성 북문지 일원 발굴조사 유구(집수지)보호시설 설치

❍ 사업 기간 : 계약일∼2018. 12. 20.

❍ 사업 장소 : 몽촌토성 발굴조사 현장(올림픽공원 내)

❍ 사업 내용

- 몽촌토성 발굴조사에서 확인된 집수지의 유구보호시설 설치

- 집수지 및 주변유구의 우천과 풍화에 따른 자연손실을 예방

- 집수지 및 주변유구에 대한 정밀발굴조사의 가능 여건 마련

❍ 소요 예산 : 금오천오백만원(금55,000,000원, 부가가치세 포함)

❍ 계약 방법 : 소액수의계약

※ 근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제33조, 제33조의2

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 한 법률 시행령 제25조 ~ 제31조

지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(안전행정부 예규) 제5장 수의계약 운영요령

여성기업지원에 관한 법률 제2조1호 및 장애인기업활동 촉진법 제2조제2호

Ⅱ		사업 배경 및 추진 경위

❍ 2018년 백제왕도유적 발굴조사 계획 수립(백제학연구소 제29호, 2018. 1. 12.)

❍ 2018년 몽촌토성 발굴조사 재착수(백제학연구소 제328호, 2018. 3. 29.)

❍ 집수지의 조사방안에 대한 2차례의 학술자문회의 결과, 유구의 훼손방지 및 정밀발굴조사를 위해서는 집수지에 대한 유구보호시설(지붕)이 필수적으로 설치되어야 한다는 의견이 제기됨.

제1차 학술자문회의 개최(백제학연구소 제352호, 2018. 4. 6.)

· 집수지 발굴은 雨水로부터 유구를 보호하기 위해 보호시설을 설치하고 조사하는 것이 바람직하며, 단계적이고 세밀할 발굴이 필요함.

제2차 학술자문회의 개최(백제학연구소 제494호, 2018. 4. 25.)

· 집수지 발굴조사를 위해서는 유구보호시설이 필수적으로 설치되어야 함.

· 유구보호시설을 설치 시 발굴조사된 도로유구를 훼손하지  않도록 일정 부분 복토를 하여야 함.

· 발굴조사 중 물의 침투를 막기위해 보호시설 외부를 충분히 보강하여야 함.

Ⅲ		소요 예산

❍ 소요 예산 : 금55,000,000원(금오천오백만원)

❍ 산출 내역

항목	명목	내용	공급가액(단위: 원)	비고
파이프 구조물 천막	1. 프 레 임	백관파이프, 트러스, 베이스판, 부자재, 용접	24,298,140	제단비 포함
	2. 천막제작	천막원단, 결속, 제작비	8,629200
	3. 현장설치	천막구조물 설치, 장비, 출입문, 운반	11,000,000
	4. 공과잡비		2,196,367	(1+2+3)의 5%
	5. 이 윤		3,920,515	(1+2+3+4)의 8.5%
소계			50,044,222
부가세			5,004,422
합계			55,000,000	(만단위이하 절사)

❍ 예산 과목 : 선사·고대 역사문화 공간 창조, 소장유물 확보 및 보존,

백제 왕도유적 발굴조사, 사무관리비(100-201-01)

Ⅳ		추진 일정

❍ 2018. 6월	: 계약 의뢰 및 계약

❍ 2018. 7~12월   : 용역 착수 및 유구보호시설 설치

❍ 2018. 12월      : 용역 준공, 결과 보고

※ 용역 추진 일정은 기상 여건(집중호우 등)에 맞추어 탄력적으로 진행

붙임  2018년 백제왕도유적 발굴조사 계획.  끝.