문서번호	시설관리과-10601
결재일자	2018.6.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장
최지영		06/18 박은선
협조

보고서(서초동 1338-11 외 2개소 배급수관정비공사)

2018. 6.

강남수도사업소

(시설관리과)

보고서(서초동 배급수관정비공사)

『서초동 1338-11 외 2개소 배급수관정비공사』와 관련, 2구간 급수수계 안정화 및 3구간 대체구간 선정을 위해 보고드림

1		공사현황

가. 공 사 명: 서초동 1338-11 외 2개소 배급수관 정비공사

나. 공사기간: 2018. 04.16. ~ 2018.12.23.

다. 공 사 비: 도급비 금860,060,450원

라. 공사개요: 배수관부설 D=15~300mm, L=1,845m, 밸브실 57개소

(공사진행사항: 1구간 완료, 3구간 남부순환로 완료, 2구간 작업예정)

마. 도 급 자: 진흥공영(주) 대표 이기성

바. 감 독 청: 서울시시설공단(대리 이가람)

2		보고내용

상기 공사의 2구간 급수수계 안정화 및 3구간 대체구간 선정을 검토하고 이를 보고합니다.

가. 2구간 급수 수계 안정화를 위한 비상 급수 배관 신설

1) 2구간 공사 전 사전 현장 조사시 발견된 사항

- 1구간, 3구간을 완료하고 2구간 공사 전 밸브 개폐 및 확인을 위한 현장조사 및 검토를 실시한 결과

- 2구간은 다량 급수처가 많아 원활한 급수 수계 안정을 위해 신설배관과 기존 600㎜ 배관을 연결하여 비상 급수 체계를 유지하고자 함

- 또한 2구간 시점부 신설관과 기존관 연결시 작동 밸브가 현재 매몰된 것으로 확인된 바, 매몰된 밸브에 대한 철개 인상 작업도 병행 실시하고자 함

2) 비상 급수 배관 및 매몰 밸브

- 비상 급수 배관: D200㎜ L5m, 부단수 및 다용도밸브 200㎜ 각 1개소 설치

- 매몰 밸브 300㎜ 철개 인상

3) 2구간 배관도 및 매몰밸브 위치, 비상관로 부설도

2구간 및 매몰 밸브	비상관로 부설

나. 3구간 반포로 굴착 불가에 따른 대체구간 선정

1) 3구간은 서초구청 도로과 굴착 승인(L650m)을 득하였으나, 남부도로사업소 일부구간 굴착 허가 취소함(남부순환로237m가능, 반포로413m취소)

- 관련문서

▶ 서초구청도로과→강남수도사업소 굴착 승인통보

〔2018년 상반기 도로관리심의회 심사 결과 알림(서초구청 도로과-3178,2018.2.28.)〕

▶ 남부도로사업소→서초구청 도로과 굴착 허가 취소 통보

〔도로굴착허가 일부 취소 요청(남부도로사업소 도로보수과-1640,2018.4.2.)〕

- 반포로의 경우, 관 부설 방향 4개 편도 차선 모두 2016년 10월 포장하여 2019년 10월 이후 굴착가능함

- 굴착가능 구간 배관부설: 남부순환로(650m 중 237m부설)

- 굴착허가 취소 구간 배관미부설: 반포로(650m 중 413m취소)

2) 대체구간 선정

- 잦은 소출수 민원으로 관 개량이 필요한 구간을 선정함

- 방배동865-12번지 일대(1985년 D80㎜, L230m)

- 방배동858-26번지 일대(1985년 D80㎜, L180m)

- 상기 구간에 대해 노후관 여부를 확인하기 위한 확인굴착을 실시하고자 함

3		조치의견

가. 아래 사항에 대해서는 즉시 시설공단에 지시하여 향후 설계변경시 반영토록 하고자 함

1) 급수 수계 안정화를 위한 비상 급수 배관 신설

2) 매몰된 철개 인상

나. 대체구간에 대한 노후 관종 확인을 위해 「2018년 서초구 상수도 공사」(주)푸르내건설 대표 박정아로 하여금 작업지시하고자 함

다. 대체구간에 대해서는 서초구청 도로과 하반기 도로굴착 허가를 득한 후, 시설공단에 지시하여 향후 설계변경시 반영토록 하고자 함

붙임: 도로굴착허가취소요청 시행문 1부.  끝.