문서번호	시설보수과-4648
결재일자	2018.6.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	서부도로사업소장
이동섭		신동헌	06/12 이학구
협조
	주무관		권순회

2018년 도로시설물 세척용역 기성(1회) 검토보고

2018. 6

서부도로사업소

(시설보수과)

2018년 도로시설물 세척용역 기성(1회) 검토보고

우리 사업소에서 시행하고 있는 ‘2018년 도로시설물 세척용역’과 관련하여 용역사로부터 기성부분 검사원(제1회)이 접수되어 작업내역에 대한 적정여부를 검토하고 그 결과를 보고함.

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 2018년 도로시설물 세척용역-서부

○ 용역기간 : 2018. 3. 13 ~ 12. 31

○ 계약금액 : 980,000천원

○ 용 역 사 : ㈜창성개발 (대표 서창수)

□ 주요 추진경위

○ 2018. 3. 13  : 용역착수

○ 2018. 3월 ~ 5월 : 도로시설물 세척작업 시행

○ 2018. 6. 8 : 기성부분 검사원(제1회) 제출

□ 기성(제1회) 검토

○ 금회 기성금액 : 608,000천원 (62.0%)

○ 기성실적 : 총3회 도로시설물 세척작업 시행

구 분	벽체타일	콘크리트	보도바닥	난간	방음판	등기구
계약물량	282,460㎡	235,119㎡	22,221㎡	16,388㎡	64,880㎡	4,368개
기성물량 (제1회)	137,648㎡	191,131㎡	14,744㎡	13,325㎡	29,159㎡	4,368개
기성율(%)	48.7%	81.3%	66.4%	81.3%	44.9%	100.0%

- 남산1,2,3호·금화터널 세척 3회, 월드컵·봉산터널 세척 2회 실시

- 지하차도 1~2회 세척 및 교량·고가 1회(봄맞이) 세척 실시 등

○ 주요 공종별 세척 사진

<터널 세척>	<지하차도 세척>	<교량 난간 세척>

□ 검토의견

○ 상기 보고내용과 같이 2018년 도로시설물 세척용역 계약물량에 대하여 작업지시에 의거 세척작업 수행을 이상없이 완료하였으며,

○ 용역업체로부터 접수된 기성부분 검사원(제1회)의 작업물량 및 기성내역 등을 확인한 결과 공종별 세척물량이 적정하므로 기성부분 준공 처리코자 함.

※ 세척용역 예산 집행 내역

(단위:원)

구 분	계약금액	전회까지 기성액	금회 기성액	기성잔액
용역비	980,000,000	-	608,000,000	372,000,000

□ 향후계획

○ 2018. 6. 12 : 기성검사(감독)조서 제출 (→관리단속과)

○ 2017. 6~11월 : 년중 세척작업 지속 시행

붙임 : 1. 용역 기성부분 검사원(1회) 1부.

2. 기성내역서(1회) 1부.

3. 기성사진대지(1회) 1부.  끝.