투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	관급자재 조달구매(우포늪 생태체험장 내 서울숲 조성공사) 변경계약 요청

1. 시설과-(2018.5.28.)호 및 공원운영과-(2018.4.26.)호와 관련입니다.

2. 우포늪생태체험장 내 서울숲 조성 공사 관급자재 조달구매건에 대하여 아래와 같이 물량변경 계약요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 계약건명 : 관급자재 조달구매 – 우포늪생태체험장 내 서울숲 조성공사

나. 변경사유 : 현장 여건에 따른 목재 및 난간 물량 변경

다. 물량변경 계약 요청내역

물품식별 번 호	품명	규격	단위	당초			변경			비고
				수량	단가	금액(원)	수량	단가	금액(원)
23341485	목 재 (멀바우)	30mm	㎡	143.24	99,500	14,252,380	175.14	99,500	17,426,430
22747881	난 간	1500*1100	경간	94	325,000	17,550,000	-	325,000	-
조달수수료		0.54%				172,620			94,570
합계						31,975,000			17,521,000

라. 예산과목 : 대외협력담당관, 지방자치단체 교류협력강화(대외협력기금 국내협력계정), 우포늪생태체험장내 서울생태숲조성, 시설비

붙 임 : 설계변경 방침서 1부.  끝.

	시설과장
주무관	송재민		조경팀장	이무림		시설과장	06/12 김재균
협조자
시행	시설과-2633	(		)	접수		(		)
우			/	http://parks.seoul.go.kr
전화		/전송		/		/	부분공개(5)