문서번호	시설보수과-4680
결재일자	2018.6.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	서부도로사업소장
이동섭		신동헌	06/12 이학구
협조
	주무관		권순회

사천교 확장 및 성능개선공사 건설사업관리용역(장기계속)

설계변경(정산) 검토 보고

2018. 6

서부도로사업소

(시설보수과)

사천교 확장 및 성능개선공사 건설사업관리용역

설계변경(정산) 검토보고

우리 사업소에서 시행중인 ‘사천교 확장 및 성능개선공사 건설사업관리용역’ 에 대한 인력투입 정산 및 물가변동 등 설계변경(정산) 검토 보고임.

Ⅰ	용역개요

○ 용 역 명 : 사천교 확장 및 성능개선공사 건설사업관리용역(장기계속)

○ 계약금액 : 807,424천원 (2차:440,689천원)

○ 용역기간 : 2016.4.1.~2018.6.14. (2차:‘17.3.1~‘18.6.14)

○ 용 역 사 :  ㈜한국건설관리공사(60%), ㈜대한콘설탄트(40%)

○ 주요 추진경위

- ‘16. 4. 1 : 감리용역(총차,1차) 계약 및 착수

- ‘17. 2.28 : 용역 1차분 준공 및 2차분 계약

- ‘18. 1~2월 : 동절기 시공 중지에 따른 감리원 투입인력 축소운영

- ‘18. 5.30 : 공사 준공검사원 접수(감리단 준공검토 결과 제출)

Ⅱ	설계변경 검토

□ 변경사유

○ 동절기 임시 공사 중단에 따른 인력투입 축소 반영

- 책임기술자(고급) 0.5개월, 분야별기술자(초급) 1개월 미투입

○ 용역 물가변동 조정액 반영

- 용역계약 일반조건 제6절 2항에 따라 직전 물가변동 계약금액 조정 기준일로부터 90일 경과

- 한국건설기술관리협회 공표 2018년 건설사업관리기술자 노임가격 품목 조정율 3% 이상

□ 설계변경 내역

구 분	당 초	변 경	증·감
총 차	807,424,000	806,959,000	감) 465,000
2 차	440,689,000	440,224,000	감) 465,000

□ 검토의견

○ 상기 보고내용과 같이 당해 공사 준공 예정에 따른 건설사업관리용역 준공처리를 위하여 인력투입 정산 및 물가변동 조정 반영한 사항으로,

○ 동절기 공사 임시 중단으로 인한 감리원 인력투입 축소 운영기간에 대한 기술자 인건비를 감액하였으며,

○ 용역계약 일반조건에 따른 용역사의 물가조정액 승인 요청사항에 대하여 2018년 감리원 노임단가 상승으로 인한 인건비 품목조정율(3.76%)을 적정 반영하였음.

○ 또한, 감리용역 최종보고서의 효율적인 관리를 위하여 성과품 납품 부수를 기존 10부에서 5부로 조정하여 설계변경(정산) 계약코자 함.

- 예산과목 : 교량안전과, 교량관리, 일반교량관리, 사천교 성능개선, 감리비

Ⅲ	향후계획

○ 2018. 6. 12 : 용역 설계변경(정산) 계약

○ 2018. 6. 14 : 용역 준공

붙임 : 1. 감리용역 설계변경(정산) 내역서 1부.

2. 용역 물가변동(ES) 산출내역 1부.  끝.