투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	생태공원과장
(경유)
제목	제3자 단가계약 변경-관급자재(그라스류 3종) 수량 변경 및 납품기간 변경 [2018년 잠실 생태숲 조성사업]

1. 생태공원과-1232(2018.06.12.)호 관련입니다.

2. 『2018년 잠실 생태숲 조성사업』관급자재(그라스류 3종) 수량변경 및 납품기간 변경에       대하여 아래와 같이 변경하고 붙임으로 통보합니다.

가. 수량변경 내역

납품요구번호	품 목	규 격	단위	당 초		변 경		증·감
				수량	금액(원)	수량	금액(원)	수량	금액(원)
12-18-1-30046-00	계			1,700	3,845,650	-	-	감) 1,700	감) 3,845,650
	새블루마운틴	8cm포트	본	1,700	3,825,000	-	-	감) 1,700	감) 3,825,000
	조달수수료		식	1	20,650	-	-		감) 20,650

나. 변경사유 : 납품업체의 납품수량 부족으로 인한 물량변경.

다. 납품기한 변경

- 당초 : 2018.4.12. ~　2018. 5.12.

- 변경 : 2018.4.12. ~　2018. 7.20.

붙임  분할납품요구 및 통지 1부.  끝.

	총무과장
주무관	안희정		총무과장	06/14 박병현
협조자
시행	총무과-7972	(		)	접수		(		)
우	04770	서울 성동구 강변북로 257	/
전화	02-3780-0719	/전송		/		/	부분공개(7)