문서번호	도로보수과-5397
결재일자	2018.6.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	강서도로사업소장
김동민		代정회곤	06/14 김용제
협조

2018년 노후포장도로정비공사 폐아스콘 운반 및 처리용역(강서2구역) 설계변경 검토보고(제1회)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 6.

도 로 보 수 과

2018년 노후포장도로정비공사 폐아스콘 운반 및 처리용역(강서2구역)

설계변경 검토보고(제1회)

우리사업소에서 시행중인 2018년 노후포장도로정비공사 폐아스콘 운반 및 처리용역(강서2구역)와 관련하여 책임건설사업관리용역사로부터 설계변경 도서가 접수되어 내용을 검토하고 아래와 같이 보고합니다.

▶ 관련문서 : 폐기물 설계변경(1회, 노후2구역) 도서 제출

책임건설사업관리용역사 한국건설관리공사 대표 이명훈

Ⅰ		사업개요

❍ 용 역 명 : 2018년 노후포장도로정비공사 폐아스콘 운반 및 처리용역                  (강서2구역)

❍ 용역개요 : 폐아스콘 운반 및 처리 : 15,591톤

❍ 용역기간 : 2018. 4. 19 ~ 2018. 12. 14

❍ 도 급 비 : 290,875,000원

❍ 도 급 자 : ㈜씨와이환경 김남순, ㈜에스지이 박창호

❍ 감 독 자 : 한국건설관리공사 책임건설사업관리기술자 이상기

❍ 예산과목 : 도로시설물관리, 도로 및 도로시설물관리(도시개발), 노후

포장도로정비공사, 시설물 및 부대비, 시설비

Ⅱ		설계변경 내용

❍ 관련근거

- 도로보수과-4187(2018.5.8.) 2018년 노후포장도로 정비공사(강서2구역)         포장물량 및 단면 변경 통보

- 도로보수과—4354(2018.5.11.) 2018년 노후포장도로정비공사(강서2구역)        아스콘 규격변경

❍ 설계변경 사유

- 과업내용서(5.기타 5)설계거리 편도 32㎞) 및 용역설명서(10. 편도 32㎞)        에 의거 운반거리 축소에 따른 실제거리 적용 및 물량 반영

❍ 수량 증감 대비표

공 종 명	규 격	단위	단가	당초물량	변경물량	증·감	비고
폐기물운반비	(현장~인천서구 도담3로) 야간, 왕복(편도32㎞)	톤	9,705	15,591	0	감)15,591
폐기물처리비		톤	5,219	15,591	23,000	증)7,409
폐기물운반비	(현장~인천서구 가좌동) 야간,왕복(편도27.58㎞)	톤	9,247	0	23,000	증)23,000	신규

Ⅲ		사업비 증·감 현황

구 분		금 액			비고
		변경전	변경후	증감액
총용역비		290,875,000	415,085,000	증 124,210,000
도급액	공급가액	264,431,819	377,350,000	증 112,918,181
	부가가치세	26,443,181	37,735,000	증 11,291,819
	계	290,875,000	415,085,000	증 124,210,000

Ⅲ		조치계획

❍ 상기 내용과 같이 실제 운반거리 반영 및 하반기 추가 공사에 따른 폐기물수량을 반영하여 설계변경을 시행코자 함

붙 임   1. 제1회 설계변경 검토보고(감리) 1부.

2. 방침서 2부. 끝.