문서번호	토목부-10194
결재일자	2018.6.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	토목설계과장	토목부장
김종혁	안규홍	06/14 김영수

- 제2자유로(난지도길) 종점부 입체화 소규모 환경영향평가용역 -

준공기한 연기 검토 보고

2018. 6.

도시기반시설본부

토목부

- 제2자유로(난지도길) 종점부 입체화 소규모 환경영향평가용역 -

준공기한 연기 검토 보고

『제2자유로(난지도길) 종점부 입체화 소규모 환경영향평가』용역자가 제출한 준공기한 연장 요청에 대하여 검토 보고 드림.

※ 동해 환경-18-00416(2018. 6. 12., 과업기간 연장 요청)

□ 용역 개요

❍ 용 역 명 : 제2자유로(난지도길) 종점부 입체화 소규모 환경영향평가용역

❍ 규    모 : 사업연장 2,708m (서울시 1,933m, 고양시 775m)

- 구룡사거리 : 평면교차로 개선(좌회전3차로, 직진4차로), 구룡교 확장 폭 6m, 연장 300m

- 월드컵파크3단지 교차로 및 디지털미디어시티입구 교차로 : 신호연동화 운영

- 월드컵경기장 교차로 : 지하차도 신설 폭 4차로, 연장 540m

- 월드컵로 : 월드컵파크 3단지 교차로~월드컵경기장 교차로(양측 2차로 확장)

❍ 용역기간 : '17. 12. 21. ~'18. 6. 20.

❍ 도 급 비 : 146백만원

❍ 용 역 자 : ㈜동해종합기술공사

□ 준공기한 연장

❍ 준공기한 연기 : 92일

- 용역기간 : 당초  '17. 12. 21.~'18. 6. 20.⇒ 변경 '17. 12. 21.~'18. 9. 20.

❍ 지체상금 : 미부과

❍ 귀책부서 : 서울특별시

❍ 연기사유 : ‘소규모 환경영향평가 보완 요청 및 협의기간 연장’(한강유역환경청 환경평가과-6810, 2018.6.1.)에 따른 소요 공기 부족으로 준공기한을 연기하고자 함

□ 조치의견 : 준공기한을 '18. 9. 20.까지 연기하여 용역을 관리하고자 함.

붙임 : 1. 과업 연장 요청 공문 및 합의 각서 각 1부.  끝.