투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	변경계약 의뢰(920공구 전면책임감리용역, 총괄12회 및 8차3회)

1. 우리본부에서 시행중인『서울지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사 전면책임감리용역』에 대하여 아래와 같이 변경계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 서울지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사 전면책임감리용역

나. 계 약 자 : 벽산엔지니어링(주) 대표이사 김 동 운

다. 변경계약 현황

(단위 : 천원)

구분	용역비					계약기간			비고
	당 초		변 경		증감	당 초	변 경	증감
총괄 12회	5,720,953		5,773,155		증)52,202 (세입세출)	‘09.11.18 ~‘18.12.31	‘09.11.18 ~‘18.12.31	-
8차 3회	1,853,353		1,905,555		증)52,202 (세입세출)	‘17.01.02 ~‘18.12.31	‘17.01.02 ~‘18.12.31	-
	1,716,557 (특별회계)	136,796 (세입세출)	1,716,557 (특별회계)	188,998 (세입세출)

라. 변경 사유

○ 한국수자원공사와 협약체결하여 시행중인『수도권 광역상수도 2단계 방이동구간 관로이설공사』와 관련 공사기간 연장에 따른 추가 감리비 반영

마. 예산과목(8차3회)

○ 도시기반시설본부, 도시철도건설, 도시철도건설사, 도시철도9호3단계건설, 시설비및부대비, 감리비

○ 세입세출외 현금<증)52,202천원>

- 광역상수도 이설공사(한국수자원공사 수탁공사 분)

붙 임 : 검토보고서 등 관련 자료 1부.  끝.

	도시철도토목부장
주무관	엄상민		토목1과장	윤방식		도시철도토목부장	06/14 이도헌
협조자	주무관	김용선		경리과장	代김용범		기획예산과장	안순봉
시행	도시철도토목부-7092	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로8 프리미어플레이스9층	/
전화	772-7214	/전송	772-7306	/		/	대시민공개