문서번호	시설관리과-11015
결재일자	2018.6.15.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설관리과장	북부수도사업소장
이한수	代이한수	천성훈	06/15 심말숙
협 조

설계변경 및 계약금액 조정시행

(2017년 북부수도사업소 관내 긴급누수복구공사)

2018. 6.

북부수도사업소

(시설관리과)

설계변경 및 계약금액 조정시행

(2017년 북부수도사업소 관내 긴급누수복구공사)

우리사업소에서 시행중인『2018년 북부수도사업소 관내 긴급누수복구공사(장기계속단가계약)』의 시공물량 증·감 및 신규공종 발생 등으로 설계변경 및 계약금액 조정이 요구됨에 따라 본부에『설계변경 심의』를 요청하여 예산집행의 효율성 및 적정한 공사집행을 도모하고자 함.

※ 관련근거 :『2018년 상수도사업 계약심사 추진계획 통보』(재무회계과-1000호)

- 연간단가계약 공사(8천만원 이상) 도급비 증액 시

공사현황

공 사 명 : 2017년 북부수도사업소 관내 긴급누수복구공사(장기계속단가계약)

공사개요

*****************************************

****************************************

계약기간 : 2017. 06. 02. ~ 2018. 06. 30.

도 급 자 : (주)서울포장  대표 이은경

도 급 비

******************************

******************************

******************************

보고내용

설계변경 사유

- 토공, 부설공, 구조물공 등 시공물량 증·감 및 신규공종 발생에 따른 변경

- 사급자재비 감소에 따른 변경

- 건강, 연금, 노인장기요양보험료 및 부지임대료 등 실정산에 따른 변경

시공물량 (증·감)현황

***	***		************	***
	***	***
****	*****	*****	*********
*****	*****	*****	*********
*	*****	*****	*********

계약금액 변경(조정) 내역                                      (단위 : 원)

***	***	***	***	***
****	*************	*************	**************	****
*****	*************	*************	**************	********
*****	*************	*************	**************	****

공종별 변경내역                                           (단위 : 원)

******	***	***	*********	***
******	***********	***********	****************
*****	***********	***********	****************
****	***********	***********	****************
*****	***********	***********	****************
*****	***********	***********	****************
*****	***********	***********	****************

심사대상기준

- 심의기관 : 상수도사업본부 요금관리부 재무회계과

- 대상기준 : 연간단가계약 공사(8천만원 이상) 도급비 증액 시

- 관련근거 :『2018년 상수도사업 계약심사 추진계획 통보(재무회계과-1000호)』

조치의견

위와 같이 물량 증․감이 발생되어 변경물량 공종에 대하여 계약단가로 적용하고, 신규공종에 대하여는 설계단가에 낙찰율을 적용코자 하며,

2017년 북부수도사업소 관내 긴급누수복구공사(장기계속단가계약)의 계약금액 증액에 따른 설계변경 심사대상으로 상수도사업본부(재무회계과)에 공사계약(설계변경 및 계약금액 조정) 심사의뢰코자 합니다.

붙 임 : 설계변경 내역서 1부.  끝.