문서번호	도로계획과-7777
결재일자	2018.6.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	도로시설계획팀장	도로계획과장		안전총괄관
김선배	양돈욱	하종현		06/18 배광환
협 조

용역 준공기한 연기 보고

(잠실·천호대교 남단IC 연결체계 개선 기본 및 실시설계)

2018. 6.

안전총괄본부

(도로계획과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

용역 준공기한 연기 보고

□ 용역개요

가. 용 역 명 : 잠실·천호대교 남단IC 연결체계 개선 기본 및 실시설계

나. 계 약 자 : ㈜제일엔지니어링외 3개 공동수급업체

다. 계약금액 : 금1,385,938,000원(금일십삼억팔천오백구십삼만팔천원)

라. 계약년월일 : 2016.06.03.

마. 착수년월일 : 2016.06.09.

바. 준공예정일 : 2018.06.30.

2. 보고내용

○ 위 용역의 준공기한을 다음과 같이 연기하고자 합니다.

가. 준공기한 : 당초 2018.06.30. → 변경 2019.04.30.

나. 연기 귀책사유 : 서울특별시

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

라. 연기사유

- 기본설계보완 및 재검토 실시[도로계획과-15772(2017.11.7.)]에 따른 기본설계 보완, 천호대교 남단IC 문화재 현상변경 심의, 설계VE, 기술심의 등 행정절차 이행을 위한 절대 소요기간 부족.

2018. 6.

보고자 : 지방시설주사 김선배