투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(도로계획과장)
(경유)
제 목	전기공사 사업비 조정 요청(장지지하차도~동부간선도로간 연결로 설치사업)

1. 도로계획과-113호(2017.01.03.)와 관련됩니다.

2. 제2롯데 교통개선대책으로 비관리청 사업 추진 중인『장지지하차도~동부간선도로간 연결로 설치공사』건설사업관리단으로부터 전기공사 실정보고에 따른 사업비 조정을 요청하오니 검토 후 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 공사비 증감현황(전기/통신분야)

【단위: 천원】

구 분	당 초	변 경	증감	사 유
전기공사	1,093,889	1,230,889	증137,000	·송파구청 요구사항 누락분 반영(차량번호인식 시스템) ·송파구청 추가 요청사항 반영(지구대연동 비상벨 시스템)

붙임 1. 실정보고에 대한 검토 보고 1부.

2. 설계변경 소위원회 심의자료제출 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	박희정		열빛총괄과장	유병기		설비부장	06/18 권오식
협조자
시행	설비부-8247	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8611	/전송	02-3708-8659	/	pakei27@seoul.go.kr	/	대시민공개