문서번호	건축부-8318
결재일자	2018.6.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축총괄과장	건축부장
김재호		박범규	06/18 임인구
협조

「정릉동 공영차고지 건립공사(건축,토목,조경)」

주계약자공동도급 공종내역 구분검토회의 결과

2018. 6.

도시기반시설본부

(건축부)

「정릉동 공영차고지 건립공사 (건축,토목,조경)」

주계약자 공동도급 공종내역 구분 검토회의 결과

주계약자 공동도급에 대하여 공사발주 전 공동수급체 구성을 위한 공종 내역 구분 검토회의를 개최하고 그 결과를 보고합니다.

Ⅰ		사업개요

□ 사업개요

❍ 공 사 명 : 정릉동 공영차고지 건립공사(건축,토목,조경)

❍ 위    치 : 성북구 정릉동 771-7호

❍ 규    모 : 지상3층/지하1층, 증축면적 4,274.65㎡

❍ 용    도 : 자동차관련시설(차고지), 문화및집회시설(전시장), 근린생활시설

❍ 공사기간 :***********************

❍ 도 급 비 :****************************************

Ⅱ		추진경위

❍ 2016.08.18.: 건립의뢰(주차계획과→도기본 건축부)

❍ 2016.08.31.: 기본 및 실시설계용역 착수

❍ 2016.11.23 : 경관심의 완료 (결과:조건부)

❍ 2017.01.10 : 기본설계VE 검토완료

❍ 2017.03.08 : 건설기술심의 완료 (결과:조건부 채택)

❍ 2017. 5월 ~ ’17. 10월 : 설계용역 중단 (151일, 재투자심사)

❍ 2018.02.09. : 경관(변경)심의 완료 (재투자심사 결과 등 반영)

❍ 2018.04.10 : 실시설계VE 및 원가심사 진행 중

❍ 2018.06.07 : 계약심의위원회 심의요청 중

Ⅲ		공종내역 검토회의

□ 회의개요

❍ 일    시 : 2018. 06. 15.(금) 10:30

❍ 장    소 : 도시기반시설본부 건축부 회의실

❍ 참 석 자

- 발 주 처 : 건축총괄과장, 담당주무관

- 설 계 자 : 책임기술자

- 외부위원 : *********************************

□ 주요 검토내용

❍ 주계약자 공동도급 발주 전 공종구분 등 검토

❍ 주요 검토내용 (따로붙임 체크리스트 참고)

- 주계약자 공동수급체 구성원수 및 비율이 적절한지 여부

(부계약자가 맡게 될 공종의 지분비율이 5%이상인지의 여부)

- 전문공종 분리 시 현장 시공여건을 고려하였는지 여부

- 각 분리공종이 특허 및 신기술을 포함하고 있는지 여부

- 공종별 시공의 난이도 및 경제성을 명확히 확인했는지 여부

- 공동수급체 구성원 간 하자구분이 분명하도록 공종내역 구분되는지 여부

□ 검토결과

********************************************

********************************

Ⅳ		향후 계획

❍ 2018.07.  : 공사 발주

❍ 2018.09.  : 공사 계약 및 착공

붙임 : 1. 참석조서 1부.

2. 공종별 공사비 비율표 1부.  끝.