투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	진접선차량기지 건설공사 설계단계 건설사업관리용역 재개 알림

1. 도시철도계획부-10164(2016.10.25.)호와 관련입니다.

2.「진접선차량기지 건설공사 설계단계 건설사업관리용역」관련 용역 일시정지중인 사항에 대하여 아래와 같이 과업재개 처리하였음을 알려드리오니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 진접선차량기지 건설공사 설계단계 건설사업관리용역

나. 용역기간 : 2015.12.15.~ 2018.7.31.

다. 정 지 일 : 2016.10.29.

※ 기본계획 변경 지연, 사전절차 이행 등으로 인한 설계기간 연장에 따라 일시정지

라. 재 개 일 : 2018.06.17.(잔여기간 45일)

마. 재개사유 : 기본 및 실시설계 완료단계에서 설계도서 검토 시행.  끝.

	도시철도계획부장
수신자	건설총괄부장,도시철도건축부장,도시철도설비부장
주무관	최원혁		도시철도설계과장	이명수		도시철도계획부장	06/18 김진팔
협조자
시행	도시철도계획부-5033	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 10층	/
전화	02-772-7141	/전송	02-772-7304	/		/	대시민공개