문서번호	건축부-8365
결재일자	2018.6.19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		문화시설과장	건축부장
이진영		윤용훈	06/19 임인구
협조

『북한산성 대성문 해체·보수공사』

실정보고에 대한 검토보고

- 석재 보존처리 및 목재 방충·방부·방염처리 -

2018. 6.

도시기반시설본부

(건 축 부)

『북한산성 대성문 해체·보수공사』

실정보고에 대한 검토보고

- 석재 보존처리 및 목재 방충·방부·방염처리 -

『북한산성 대성문 해체·보수공사』관련, 문화재 감리원으로부터 실정보고가 제출되어 아래와 같이 검토보고 드림

Ⅰ		공사개요

○ 위    치 : 성북구 정릉동 북한산성 대성문(사적 제162호)

○ 공사내용(해체·보수 범위)

- 문  루 : 바닥면적 35.24㎡, 높이 5.7m

- 육축부 : 높이 5.5m, 폭 12m, 너비 8m

○ 사업기간 : 2016.01. ~ 2018.08.

- 설 계 : 2016.05. ~ 2016.12.

- 공 사 : 2017.02. ~ 2018.08.

○ 총사업비 : 1,300백만원(공사비 1,210 / 설계비 53 / 감리비 30)

○ 시공/감리 : 원택건설㈜ / ㈜경복영건

○ 현장사진

지붕공사(개판 설치)	지붕공사(서까래 시공)

Ⅱ		추진경위

○ 2017. 02. : 공사착공

○ 2017. 06. : 헬기운항 허가 및 가설자재 운반

○ 2017. 07. : 가설휀스, 우회등산로 설치

○ 2017. 08. 22 ~ 11. 16. : 1~3차 전문가 자문회의

- 홍예 처리 방안, 문루부 목부재 및 육축부 석재 교체범위 등 자문

○ 2017. 12. 23 : 육축 및 문루해체 완료

○ 2018. 02. 24. : 설계변경 계약(1·2차 공사)

- 공사비 증) 35,000천원 / 공사기간 : 변경 없음

○ 2018. 02. 27. : 1차 공사 준공 및 2차 공사 착수

○ 2018. 03. 05. : 성곽공사(육축 쌓기) 완료

○ 2018. 06. 현재 : 목가구 조립완료 및 지붕공사 중

Ⅲ		실정보고 검토내용

□ 관련 근거

○ 1차 전문가 자문회의 결과 (2017. 8. 27.)

- 단청(방충·방부·방염)공사는 신·구 부재 모두 시행함이 타당함

○ 3차 전문가 자문회의 결과 (2017. 11. 16.)

- 무사석은 구조적으로 문제가 있는 것은 교체 및 경미한 부재 수지처리

○ 원택대성문 제 2018-13호 (2018. 5. 31.)

- 석재 수지처리 및 목재 방충·방부·방염 처리 관련 시공자 실정보고

○ (주)경복영건 기술검토 제180531호 (2018.05.31.)

- 시공자 실정보고에 대한 문화재 감리원 검토 의견

□ 주요 변경내용 및 사유

공 종	당 초	변 경	변 경 사 유
육축 보수 공사	-	석재보존처리	- 무사석 중 경미한 석재에 대해 균열보수 처리하였으나 적용대상 석재 외에 표면풍화에 의한 표면박리 및 탈락된 석재에도 석재 보존처리 필요(전문가 자문)

○ 성곽공사

○ 문루공사

공 종	당 초	변 경	변 경 사 유
단청 공사	방부방충 287.16㎡ 방염 26.70㎡	방부방충 287.16㎡ 방염 26.70㎡	- 단청공사 중 방부·방충제 및 방염제 도포의 노무비가 설계 누락되어 반영 필요

□ 단가적용 기준

○ 적용기준(공사계약 일반조건 제7절)

- 신규 비목 단가 : 설계변경 당시를 기준으로 산정한 단가 × 낙찰률(86.70%) 적용

○ 단가적용 현황

- 석재 보존처리(견적 내역)

구분	조사가격 1	조사가격2	조사가격3	낙찰률 적용	비고
석재 보존처리	2,960,000	3,250,000	3,580,000	2,566,320	신규 비목

- 단청공사(방부·방충·방염) 노무비 (※ 붙임 문서 참조)

: 문화재수리(보존과학 분야)노임단가(※ 붙임문서 참조)에 낙찰률 적용

□ 실정보고 요청금액

○ 석재보존처리 : 2,566,320원 (재경비 제외)

○ 단청(방부·방충·방염)공사 : 845,198원 (재경비 제외)

구 분		금 액		증 감	비 고
		변 경 전	변 경 후
총 공 사 비		510,767,400원	515,647,000원	증)4,879,600원
도 급 비	공 급 가 액	464,334,000원	468,770,000원	증)4,436,000원
	부 가 세	46,433,400원	46,877,000원	증)443,600원
	합 계	510,767,400원	515,647,000원	증)4,879,600원

○ 공사비 증·감 현황(2차 공사)

Ⅳ		감리자 검토의견

○ 석재 보존처리 공사

- 무사석 중 경미한 석재에 대한 균열부에 수지처리 하였으나 적용대상 석재 외에도 표면 풍화에 의한 표면박리 및 탈락된 석재에도 보존처리 필요

○ 방부·방충·방염처리 공사

- 단청공사 중 방부·방충 및 방염처리 공사는 노무비가 누락되어 반영 필요하며 일위대가의 보존과학공 노무비 반영에 따라 단가 변경

Ⅴ		처리의견

○ 전문가 자문회의 결과 및 문화재 감리원의 검토 의견에 따라 실정보고

승인 및 2차 공사 내역변경에 반영코자 함.

붙 임: 1) 문화재 감리원 검토의견서 1부.

2) 시공자 실정보고 공문  1부.

3) 석재 보존처리 실정보고서 1부.

4) 단청(방부·방청·방염)공사 실정보고서 1부.

5) 변경내역서(2차 공사) 1부.

6) 전문가 자문의견서 각 1부.  끝.