문서번호	도로보수과-5113
결재일자	2018.6.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	북부도로사업소장
최병수		김학동	06/19 신응수
협조

2018년 노후포장도로 노면표시 설치공사 - 1구역 설계변경(제1회) 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

북부도로사업소

도로보수과

설계변경(제1회) 검토 보고

[ 2018년 노후포장도로 노면표시 설치공사(연간단가) – 1구역 ]

우리사업소에서 시행중에 있는 『2018년 노후포장도로 노면표시 설치공사(연간단가)-1구역』에 대하여 시공물량 증․감에 따른 변경 사항이 있어 아래와 같이 설계변경 검토 내용을 보고 함.

공사현황

❍ 공 사 명 : 2018년 노후포장도로 노면표시 설치공사(연간단가)-1구역

❍ 공사개요 : 차선도색 91,830m,  도로표지병 100개

❍ 공사기간 : 2018. 03. 20. ~ 2018. 12. 20.

❍ 계 약 자 : *************

❍ 계약금액 : *************

관련근거

❍ ***********************************

설계변경 사유

❍ 노면표시 시공물량 증 ․ 감에 따른 공종별 수량 조정

설계변경 내용

❍ 공사비 변경

구 분		설계변경 금액(원)		증․감(원)	비 고
		당 초	변 경
****		***********	***********	************
* * *	****	***********	***********	************
	***	**********	**********	***********
	*	***********	***********	************
관급자재비		101,625,000	224,385,640	증122,760,640

❍ 주요공정 변경 내역

공 종	규격	단위	당초	변경	증․감		비고
백색실선	수동식	m	8,560	8,433	감)	127
백색파선	수동식	m	9,000	19,550	증)	10,550
황색실선	수동식	m	24,640	28,716	증)	4,076
황색파선	수동식	m	5,510	28,038	증)	22,528
청색실선	수동식	m	2,490	2,960	감)	470
청색파선	수동식	m	570	570	-	-
문자/기호	수동식	m	18,400	26,965	증)	8,565
횡단보도	수동식	m	22,610	45,518	증)	22,908
제거	수동식	m	50	50	-	-
합 계		m	91,830	160,800	증)	68,970

- 표지병 변경내역

공 종	종 류	당초	변경	증․감		비고
도로표지병 설치(개)	130×110×30	50	50	-	-
도로표지병 제거(개)	130×110×30	50	50	-	-
합 계		100	100	-	-

조치계획

❍ 감리사로부터 제출된 설계변경 내역에 대하여 검토한 결과 계약수량 대비 시공물량 증 ․ 감 사항이 적정하므로, 상기 내용과 같이 설계변경(1회)을 시행코자 하며, 노후포장도로 정비공사와 병행된 사업이므로 추가적으로 소요되는 예산은 노후포장도로 정비공사 예산을 사용하여 공사추진에 만전을 기하고자 함.

따로붙임 : 변경설계서(1회) 1부.  끝.