위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	담터지하차도 유지관리 협약서(안) 검토의견 제출에 대한 조치계획 알림

1. 도로계획과-7225(2018. 6. 1.) 및 도로시설과-6305(2018. 6. 8.)와 관련입니다.

2. 남양주 별내지구 광역교통개선대책의 일환으로 시행중인 담터지하차도의 유지관리 협약서(안) 검토의견 제출에 대한 조치계획을 붙임과 같이 통보합니다.

3. 참고로 서울시 구간 대로1-13호선 건설 사업기간 변경 중임을 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

노 선 명	사 업 기 간		비 고
	당 초	변 경
대1-13호선	‘15.02.26 ∼ ‘18.06.30	‘15.02.26 ∼ ‘18.09.30	증) 3개월

붙임 : 1. 검토의견 제출에 대한 조치계획 1부.

2. 협약서(수정안) 1부.

3. 사업기간 연장 신청서(LH공사) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	도로시설과장,서울특별시 북부도로사업소장
★주무관	김영백		광역도로계획팀장	박영서		도로계획과장	06/19 하종현
협조자
시행	도로계획과-7871	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 신청사 10층 도로계획과	/
전화	02-2133-8087	/전송	02-2133-0763	/	kyb4321@seoul.go.kr	/	부분공개(5)