＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	상수도사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	정수센터 녹지조성 및 유지관리 기본계획 용역기간 변경 시행

『정수센터 녹지조성 및 유지관리 기본계획 용역』에 대하여 아래와 같이 용역기간 변경시행하여 녹지조성 및 유지관리 용역시행에 만전을 기하고자 합니다.

1. 용 역 명 : 정수센터 녹지조성 및 유지관리 기본계획 용역

2. 대 상 지 : 광암아리수정수센터 등 6개소

3. 도 급 자 : ㈜서우티이씨 대표 강대신

4. 도 급 비 : 26,514,000원(변경없음)

5. 용역기간 변경

❍ 당   초 :　2018. 2. 21. ~ 2018. 06. 20.

❍ 변   경 :　2018. 2. 21. ~ 2018. 07. 10(20일)

❍ 변경사유 :　기본계획(안)에 대한 설명회 및 의견수렴을 위하여 기간 연기

6. 예산과목 : 깨끗하고 미네랄이 풍부한 아리수 생산, 안정적인 아리수 생산기반 구축,정수장시설 유지보수, 수선유지교체비, 수선유지비

(정수센터 녹지조성 및 유지관리 기본계획 용역)

붙 임 : 보고서 1부. 끝.

주무관	한광수		생산관리과장	한희선		생산부장	06/19 유성종
협조자	★주무관	정남숙
시행	생산관리과-6427	(		)	접수		(		)
우			/	http://arisu.seoul.go.kr
전화		/전송	02-3146-1319	/		/	대시민공개