투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	준공기한 연기요청(도림천1복개외2개소 내진성능평가 및 내진성능개선공사 실시설계용역)

우리 사업소에서 시행중인 「도림천1복개외2개소 내진성능평가 및 내진성능개선공사 실시설계용역」 에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 도림천1복개외2개소 내진성능평가 및 내진성능개선공사 실시설계용역

나. 용역기간 : 2017.10.23. ~ 2018.06.28

다. 용 역 사 : ㈜진우엔지니어링코리아 대표 김명철

라. 용역기간 연기

용 역 명	용 역 기 간		비 고
	당 초	변 경
도림천1복개외 2개소 내진성능평가 및 내진성능 개선공사 실시설계 용역	2017.10.23.~2018.06.28.	2017.10.23.~2018.07.28.

마. 준공기한 연기사유 : 자문회의 결과 외부전문가 의견사항 검토 및 보고서 수정 등에 따른 소요기간 필요

바. 지체상환금 부과여부 : 미 부과

붙임 : 준공기한 연기검토보고서 및 변경합의각서 각 1부.  끝.

	시설보수과장
주무관	박종헌		시설보수과장	06/19 권태선
협조자	주무관	신동헌
시행	시설보수과-2457	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3284-5461	/전송	836-3093	/	pjh0368@seoul.go.kr	/	부분공개(5)