문서번호	누수방지과-5735
결재일자	2018.6.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		누수방지과장	시설안전부장
문성원		유승효	06/19 강신재
협조

『2018년 취·송수 및 공정유량계 교정검사』

기성준공(1차) 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 6.

상수도사업본부

(누수방지과)

『2018년 취․송수 및 공정유량계 교정검사』

기성준공(1차) 보고

광암 등 6개소 아리수정수센터 취·송수 유량계 상반기 교정검사 완료분에 대하여 기성준공(1차) 처리코자 보고 드림.

※ 2018년 상반기 취·송수유량계 교정검사 결과보고(누수방지과-5657, 2018. 6. 18.)

용역개요

❍ 사 업 명 : 2018년 취·송수 및 공정유량계 교정검사 용역

❍ 용역개요 : 유량계 교정검사 116회[취·송수 31대(상.하반기), 공정 48대, 휴대용 6대]

❍ ****************박성덕

❍ *******************

❍ ********************************

기성준공(1차) 현황

❍ 기성준공 내역 : 교정검사 31개소(취수 13, 송수 18)

구 분	계	광암	구의	뚝도	영등포	암사	강북
취 수	13	1	3	2	1	3	3
송 수	18	2	3	2	4	4	3
합 계	31	3	6	4	5	7	6

❍ 금회 기성금액 : 24,129,860원

용 역 명	계약금액	기성금액	잔여금액	기성율(%)	비고
취․송수 및 공정 유량계 교정검사 용역	89,734,540	24,129,860	65,604,680	27

❍ 세부내역

구 분	적 요	단위	단 가	계약금액		금회기성금액		기성 후 잔여금액		기성율 (%)
				수량	금 액	수량	금 액	수량	금 액
1.교정검사	1,000㎜ 미만	대	612,402	4	2,449,608	2	1,224,804	2	1,224,804	50.00
2.교정검사	2,000㎜ 미만	대	656,145	39	25,589,655	10	6,561,450	29	19,028,205	25.64
3.교정검사	2,000㎜ 이상	대	743,631	69	51,310,539	19	14,128,989	50	37,181,550	27.54
4.휴대용 교정검사	공장교정	대	316,936	6	1,901,616	-	0	6	1,901,616	0.00
5.환풍기	220V, 125×125	개	13,122	20	262,440	-	0	20	262,440	0.00
6.보고서	A4(상,하반기)	권	10,500	6	63,000	2	21,000	4	42,000	33.33
7.공급가액					81,576,858		21,936,243		59,640,615	27
8.부가가치세	공급액 10%				8,157,686		2,193,624		5,964,062	27
도 급 액					89,734,540		24,129,860		65,604,680	27

보고자 의견

❍ 2018 상반기 취․송수 및 공정유량계 교정검사 용역감독 결과 용역설계서 및 세부 시방서에 의거 차질없이 이행되었기에 기성 준공(1차)처리코자 합니다.

- 기성(1차) 금액 : 금24,129,860원

- 예산과목

· 시설안전부/상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비(수선유지비)-24,129,860원

· 생산부/상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비(수선유지비)- 0원

- 준공 검사원 지정 : 공업6급 차경호, 행정6급 김영일

붙임 : 1. 상반기 취․송수유량계 교정검사 결과 보고 1부.

2. 기성총괄 내역서 1부.

3. 상반기 취․송수유량계 교정검사 사진철 및 성과품(별첨) 1부.  끝