위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	낙원상가 공용공간 개선용역 준공기한 연기 의뢰

1. 역사도심재생과-7325(2018.6.18.)호와 관련입니다

2. 우리부서에서 시행중인「낙원상가 공용공간 개선 기본 및 실시설계 용역」에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 낙원상가 공용공간 개선 기본 및 실시설계 용역

나. 계 약 자 : 주식회사 조진만건축사사무소(대표 조진만) 외 2

다. 준공기한

- 당초 : 2017.12.20.~ 2018.6.20. ⇒ 변경 : 2017.12.20.~ 2018.8.31.

라. 연기사유

- 전문가 자문회이 등 사전절차 이행, 제7대 전국 동시 지방선거 기간(‘18.4.14~6.13) 동안 주민설명회 및 주민동의 절차를 이행 할 수 없는 등 설계가 지연됨에 따라 절대공기가 부족하여 준공기한 연기

마. 귀책소재 : 서울특별시

붙임 : 1. 준공기한 연기보고(방침서) 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.

3. 합의각서 각 1부.  끝.

	역사도심재생과장
주무관	김영무		도심정책팀장	김용민		역사도심재생과장	06/19 양병현
협조자
시행	역사도심재생과-7372	(		)	접수		(		)
우	04524	서울시 중구 세종대로 110 역사도심재생과(11층)	/
전화	02-2133-8493	/전송	02-2133-0742	/	moo123@seoul.go.kr	/	대시민공개